안전건설과

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속사업	담 당	안전관리담당 임재호
						○	담당자	정진우 (☏5201)

선제적 재난예방 대책

❍ 재난예방활동 강화로 위험요인 사전 해소

❍ 재난 초기대응 역량강화로 군민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

❍ 재난예방 및 초기 대응역량 강화

❍ 안전문화운동 추진

❍ 여름철 물놀이 안전관리 추진

□ 추진계획

❍ 재난예방 및 초기 대응역량 강화

- 함양군 안전관리계획 수립 : 2017. 5.

- 재난대응 안전한국훈련 실시 : 1회(5~6월 중)

- 재난취약시설 안전점검 : 964개소(특정86, 시특13, 해빙기16, 사각2, 기타847)/ 연2회)

- 안전신문고 등 재난신고제도 적극 홍보 : 캠페인 연 4회 이상

❍ 안전문화운동 추진

- 어린이 안전체험학습장 운영

·춘기(4월~6월), 추기(9월~10월) 2회 운영

·교육목표 : 연간 500여명/유치원, 초등학생

- 매월 4일 안전점검의 날 운영 : 캠페인 및 취약지역 안전점검 실시

❍ 여름철 물놀이 안전관리 추진 : 2017. 6. ~ 8.

- 인명구조시설·장비 점검 : 176개소

- 안전관리요원 배치 : 35명 (유급요원 15, 119시민수상구조대 20)

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①재난취약시설 안전점검(%)	100	(조치완료건수/전체지적건수)*100	30	점검보고서
②인명구조시설·장비점검(%)	100	(조치완료건수/전체지적건수)*100	30	점검보고서
③어린이 안전체험학습장(명)	500	(교육인원/목표인원)*100	20	결과보고, 운영일지
④캠페인 홍보(회)	4	(실시횟수/목표횟수)*100	20	관련공문

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속	담 당	건설담당 최기창
						○	담당자	배현준 (☏5204)

주민숙원사업 시행

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 사업개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 374개소

․ 주민숙원사업 : 236개소(주민참여 17, 읍면건의 16, 주민숙원 203)

․ 소규모주민숙원사업 : 96개소

․ 기타 : 42개소

- 사 업 비 : 9,132백만원

- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 60백만원

- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2016. 12. ~ 2017. 2.

- 합동설계 : 2017.  1. ~ 2.

- 사업착공 : 2017.  3.

- 사업준공 : 2017. 11.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2017. 2.

- 협의 취득 및 이전등기 : 2017. 2. ~ 12.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 주민숙원사업 해결(%)	100	(해결건수/건의건수)*100	40	결재 공문
② 국공유지 민원 해결(%)	100	(해결건수/민원건수)*100	20	결재 공문
③ 새마을사업 편입부지 공부정리(%)	100	(실적건수/계획건수)*100	20	결재 공문
④ 새마을사업 부지부지 등기(%)	100	(실적건수/계획건수)*100	20	결재 공문

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속	담 당	도로담당 최인기
				○			담당자	이현태 (☏5205)

이은~난평간도로 확·포장공사

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

❍ 지방도 확·포장으로 원활한 통행성 확보로 편익 증진 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 이은~난평간도로 확포장공사

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.5km, 교량가설 L=46m

❍ 사 업 비 : 18,000백만원

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		2016까지		2017년		2018이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장L=2.5km 교량 1개소 L=46m	18,000	실시설계용역 1식	200	도로확포장L=0.1km	1,000	도로확포장L=2.4km 교량 1개소 L=46m	16,800

❍ 추진실적 및 향후계획

- 실시설계 : 2015. 6. ~ 12.

- 행정절차 이행 : 2015. 10. ~ 2017. 12.

- 보상협의 : 2017. 1.

- 공사착공 : 2018. 1.

- 공사준공:  2020. 1.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 안전사고발생(건수)	0	공사안전사고발생여부	10	산업재해 신고
② 재정집행율(%)	70	(‘17년 집행예산/ ‘17년 총사업비)*100	40	e 호조
③ 보상협의(%)	60	(‘17년보상금액/ ‘17년보상목표액)*100	20	‘17년 보상조서
④ 국도비 예산확보액(%)	100	(확보액/예산확보 목표액)*100	30	예산서

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속	담 당	복구지원담당 조영현
			○				담당자	염희생 (☏5202)

가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

❍ 개발사업 추진에 따른 인공 급경사지가 특성상 붕괴위험이 상존

❍ 자연재해 우려지구를 정비하여 군민의 생명․재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 일원

❍ 사 업 량 : 국지도 60호선, 사면 정비 L=75m, H=10m

❍ 사 업 비 : 1,200백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

❍ 사업비 투자계획

(단위:백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비				2017년	2018년 이 후
			계	국비	도비	군비
가흥3지구 급경사지 붕괴위험 지역정비 사업	마천면 가흥리	사면정비 L=75m H=10m	1,200	600	180	420	400 (실시설계 및 보상)	800

□ 추진계획

❍ 분할측량 및 감정평가 의뢰 : 2017. 2.

❍ 사업착공 : 2017. 3.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 3월까지 조기 착공율(%)	100	(‘17조기착공건수/’17사업건수)*100	25	착공계
② 연내 사업준공율(%)	100	(‘17준공량/‘17전체사업량)*100	25	공사중(시기미도래)
③ 재정 집행율(%)	70	(‘17집행액/‘17총사업비)*100	25	e 호조 참조
④ 국도비 예산확보액(억원)	3	(확보액/목표액)*100	25	예산서 참조

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속	담 당	하천담당 강득만
						○	담당자	김기현 (☏5203)

자연친화적 하천관리 사업

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 고향의 강으로 하천조성

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2017년	2018이후
계	3개소	하천정비 L=9.13km 교량 3개소	62,319	35,956	10,252	16,111
함양위천 생태하천 조성사업	함양읍 죽곡리 (솔숲) ~ 이은리(인당교)	o 하천정비 L=3.4km o 교량 1개소	30,944	22,756	3,000	5,188
구룡천 고향의강 조성사업	함양읍 난평리 (신기교) ~ 이은리(이은교)	o 하천정비 L=2.3km o 교량 2개소	17,687	9,100	4,422	4,165
소하천 정비사업	관동소하천외 2개소	o 하천정비 L=3.43km	13,688	4,100	2,830	6,758	관동 미동 오현

□ 추진계획

❍ 착  공 : 2017.  2.

❍ 준  공 : 2017. 12.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①3월까지 조기 착공율(%)	100	(착공건수/사업건수)*100	25	착공신고서
②연내 사업준공율(%)	100	(준공건수/착공건수)*100	25	준공신고서
③재정 조기집행률(%)	60	(예산집행액/재정집행목표액)*100	25	예산집행실적(이호조)
④국도비 예산확보액(억원)	70	(확보액/목표액)*100	25	예산서

부서명	안전건설과	공약	신규	역점	합동평가	계속	담 당	농업기반담당 박종필
						○	담당자	강기영 (☏5206)

재해위험 저수지 정비사업

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 두산저수지, 유림면 유평리 유평저수지

휴천면 호산리 도장골저수지, 안의면 대대리 대대웃못저수지

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 7,863백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4년간)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2016년까지	2017년	2018년이후
합 계	7,863	2,370	2,330	3,163
두산	2,270	1,670	600
유평	1,793	500	600	693
도장골	2,000	100	600	1,300
대대웃못	1,800	100	530	1,170

□ 추진계획

❍ 도장골, 대대웃못저수지 착공               : 2017.  4.

❍ 두산저수지사업 준공                       : 2017. 12.

❍ 유평,도장골,대대웃못 저수지사업 준공       : 2018. 12.

□ 평가지표

성과지표(단위)	2017년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
①2월까지 조기 착공율(%)	100	(착공건수/사업건수)*100	25	착공신고서
②연내 사업준공율(%)	100	(준공건수/착공건수)*100	25	준공신고서
③재정 조기집행률(%)	60	(집행액/목표액)*100	25	예산집행실적(이호조)
④국도비 예산확보액(억원)	10	(확보액/목표액)*100	25	예산서