상하수도사업소

74. 소규모수도시설 개량을 통한 깨끗한 음용수공급 - 3 75. 맑고 안정적인 마을상수도 공급 -- 4 76. 공공하수처리시설 수질TMS설치 -- 5

소규모수도시설개량을 통한 깨끗한 음용수 공급

74

○ 노후, 원수부족, 수질불량 시설에 대한 개량 정비로 음용수의

안정적 공급과 군민 보건 향상 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 01 ~ 11월

○ 사 업 량 : 소규모 수도시설 개량 6개소

○ 사 업 비 : 1,332백만원

○ 사업내용 : 관로개량 L=6.8km, 배수지정비 2개소 등

□ 추진계획

○ 사업내용                               (단위 : 백만원)

구분	위 치	사업량 (개소)	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계		6개소	1,332	932	-	400
음정	마천면 삼정리	L=1.6km	192	134	-	58
신당	안의면 황곡리	L=2.0km	240	168	-	72
황대	안의면 월림리	L=1.5km	180	126	-	54
우전	서하면 봉전리	L=1.8km	216	151	-	65
옥산	서상면 옥산리	L=2.7km	324	227	-	97
소현	병곡면 옥계리	L=1.5km	180	126	-	54

○ 추진일정

- 2013. 1∼2월 : 실시설계 및 주민설명회

- 2013. 3∼4월 : 부지보상 및 동의서징구 협의, 행정절차 이행

- 2013. 4∼11월 : 사업시행 및 완료

- 2013. 11월 : 사업완료

□ 향후 계획

○ 사업완료후 원활한 음용수 공급을 위한 유지관리위탁 실시

✍ 상하수도사업소 관리담당 (☎ 960-5231)

맑고 안정적인 지방상수도 공급

75

❍ 기후변화로 인한 갈수기 상수원 고갈 대비 풍부한 지방상수도

상수원 확보 및 누수율 제고로 지방상수도 보급률 향상

❍ 먹는 물로 인한 주민불편 해소 및 보건위생 향상

□ 사업개요                            (단위 : 백만원)

구 분		사업량 및 내용	사업비	추진기간	비 고
지방상수도 상수원 확보	대체수원 확보	대체관정 33공	10	연중
	보조수원지 확보	저수지 확장보강1식 관로신설 3.25km	300	1～10월	사업추진 ‘13～‘14
지방상수도 유수율 제고		노후관로 교체 21㎞ 누수탐사 용역 1식	596	1～12월	사업추진 ‘09～‘16
지방상수도 보급률 제고	서상농어촌 지방상수도 개발사업	V = 643천㎥ Q = 3,700㎥/일	6,429	1～12월	사업추진 ‘06～‘14
	지방상수도 급수구역 확대사업	4개마을(실시설계)	31	1～10월	사업추진 ‘10～지속

□ 그간추진상황

❍ 지방상수도 개발사업 : 수원시설 및 정수장 구조물 5동

❍ 노후관로 교체사업 : 12.5㎞

❍ 급수구역 확대사업 : 10개 마을

□ 추진계획

❍ 지방상수도 상수원 확보

- 대체관정 점검(매분기) 및 한국농어촌공사 협조체계 구축(수원활용)

- 보조수원지 확보 : 실시설계, 행정절차 이행 및 관로신설 1.2km

❍ 지방상수도 유수율 제고

- 노후관로 3.0㎞ 교체로 누수사고 예방

- 연중 누수탐사 시행 및 누수관 신속 복구로 유수율 향상

❍ 지방상수도 보급률 제고

- 서상 지방상수도 개발사업 추진

․정수장기계설비(전기) 1식, 관로시설 5km(배수2.5km, 송수2.5km)

- 지방상수도 급수구역 확대사업 추진

․4개마을(수동 서평․효리․남계, 지곡 개평) 실시설계 용역

✍ 상하수도사업소 상수도담당 (☎ 960-5232)

공공하수처리시설 수질TMS 설치

76

□ 하수 방류수질의 실시간 측정 및 관리로 수질오염사고 예방

□ 지속적 수질관리를 통한 공정개선과 깨끗한 수자원 확보

□ 사업개요

❍ 대    상  : 안의하수처리장, 수동하수처리장

❍ 위    치  : 안의면 이전리 및 수동면 화산리 일원

❍ 사업기간  : 2013. 01 ～ 12월

❍ 사 업 량  : 수질TMS(자동측정기기) 설치 각1식(건축포함)

❍ 총사업비  : 503백만원

□ 그간추진상황

❍ 2013. 01 ～ 02월 : 시설설치를 위한 실시설계

□ 추진계획

❍ 2013. 03월 : 건축협의

❍ 2013. 04 ～ 12월 : 사업시행

❍ 2013. 10 ～ 12월 : 시운전

❍ 2014. 01월 : 정상가동

✍ 상하수도사업 하수도담당(☎ 960-5233)