부서		상하수도사업소
시책별가중치		시책 번호	담당	시책명	사업비	가중치
			계	3건	15,773	1.0
		74	관리담당	소규모수도 시설개량을 통한 깨끗한 음용수 공급	943	0.3
		75	상수도담당	맑고 안정적인 상수도 공급	7,870	0.3
		76	하수도담당	함양공공하수처리시설 증설사업	6,960	0.4

시책번호	74	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	상하수도사업소		담 당	관리	전화번호	960-5231
시 책 명	소규모수도시설개량을 통한 깨끗한 음용수 공급

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 1 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 소규모수도시설개량 5개소

❍ 사 업 비 : 943백만원(국비 660, 지방비 283)

❍ 사업내용 : 관로개량 L=9.0km

□ 추진계획

❍ 사업내용                                             (단위:백만원)

구분	위 치	사업량 (개소)	사 업 비				비고
			계	국비	도비	군비
계	5개소	L=9.0km	943	660	-	283
상대평	백전면 경백리	L=1.2km	84	58	-	26
연 서	병곡면 연덕리	L=2.5km	210	147	-	63
운 서	휴천면 운서리	L=2.0km	200	140	-	60
식 송	서상면 상남리	L=2.2km	331	231	-	100
제 전	수동면 내백리	L=1.1km	118	84	-	34

❍ 추진일정

-  2014.  1~3월 : 실시설계 및 주민설명회 실시

-  2014.  3~4월 : 사업발주 및 착공

-  2014.   11월 : 사업완료

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비 중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계	1~3월중		30%
사업착공	3~4월중		20%
사업추진	- 1지구 L=1.2m - 2지구 L=1.1km - 3지구 L=2.5km - 4지구 L=2.2km - 5지구 L=2.0km		30%
사업완료	11월말		20%

시책번호	75	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	상하수도사업소		담 당	상수도	전화번호	960-4264
시 책 명	맑고 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요                                   (단위 : 백만원)

구 분		사업량 및 내용	사업비	추진기간	비 고
유수율 제고	노후관로 교체사업	노후관로 교체 1㎞	200	4～12월
지방상수도 보급률 제고	서상농어촌 지방상수도 개발사업	관로매설 L=16.0km 전기 및 계축제어 1식	6,963	2～12월	사업추진 ‘06～‘15
	지방상수도 급수구역 확대사업	1개마을	250	4～10월
	지방상수도 보조수원지 확장사업	관로매설 L=1.2km	260	4～10월
상수도 보안 시설 보강	함양상수도 배수지 보강사업	배수지 1개소	200	3～6월

□ 추진계획

❍ 노후관로 교체사업 : 2014. 4월 착공, 2014. 12월 준공

❍ 서상농어촌 지방상수도 개발사업 : 2014. 2월 착공, 2014. 12월 준공

❍ 지방상수도 급수구역 확대사업 : 2014. 4월 착공, 2014. 10월 준공

❍ 지방상수도 보조수원지 확장사업 : 2014. 4월 착공, 2014. 10월 준공

❍ 함양상수도 배수지보강사업 : 2014. 3월 착공, 2014. 6월 준공

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
실시설계	2~4월중		10%
사업착공	2~4월중		10%
사업추진	- 배수지보강 : 6월 준공 - 급수구역확대 및 보조 수원지 확장사업 : 10월 준공 - 노후관교체 및 지방 상수도개발사업 : 12월 준공		70%
사업완료	6월~10월중		10%

시책번호	76	분야	활력있는 창조경제		대상시책	군수공약	주요업무	합동평가
							○
부 서 명	상하수도사업소		담 당	하수도	전화번호	960-4061
시 책 명	함양 공공하수처리시설 증설사업

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 함양 공공하수처리시설 증설사업

❍ 위    치 : 함양읍 용평리 27번지

❍ 사업기간 : 2013. 1 ∼ 2015. 8월

❍ 사 업 량 : 증설 2,600㎥/일(7,000㎥/일 ⇒ 9,600㎥/일)

❍ 총사업비 : 6,960백만원(국비 2,598, 지방비 4,362)

□ 추진상황

❍ 2013. 02월 : 하수처리 공법선정

❍ 2013. 09월 : 기본 및 실시설계

❍ 2013. 09월 : 사업인가 및 재원협의

❍ 2013. 12월 : 사업시행

□ 추진계획

❍ 2015. 2∼7월 : 시운전

❍ 2015. 8월    : 사업준공

□ 평가지표

항 목	2014 목표	2014 실적	비중	목표달성도(%)
계			100%
사업추진	총인시설건축 : 10월 전기계측제어 구축 : 11월 구조물 설치 : 6월		70%
시 운 전	2015. 1∼7월		20%
사업준공	2015. 8월		10%