휴양밸리산업과

부서명	휴양밸리산업과	담 당	운영총괄담당 박종필	담당자	방창민 (☏4235) 홍성민 (☏4813)

산삼휴양밸리 조성 및 운영

2019년에 광평지구·원산지구 임시 운영을 목표로 하여 불로장생    2020함양산삼항노화엑스포 개최시 제2행사장으로 활용

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지, 원산리 산1번지 일원

❍ 규모/총사업비 : 273ha / 852억원

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년

❍ 사업개소 : 8개소(준공 3개소, 추진중 5개소)

□ 추진계획

❍ 2019.  4월 : 산삼휴양밸리 조성사업(주차장, 오수처리시설) 준공

❍ 2019.  7월 : 산삼콤플렉스센터 준공

❍ 2019.  8월 : 산림생태문화체험단지 조성사업 준공

❍ 2019.  9월 : 산삼휴양밸리 모노레일 준공

❍ 2019. 10월 : 대봉산 산림레포츠시설 조성사업 준공

❍ 2020.  6월 : 서함양 하이패스IC 설치사업 준공

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 총괄운영계획 수립	1회	(처리건수/계획건수)*100	25	결재공문
② 신속집행실적	60%	(예산집행액/ 예산현액의 60%)*100	25	지방재정관리시스템
③ 사업 준공 개소	5개소	(준공 개소/전체개소)*100	25	준공검사조서
④ 조례개정	완료	조례 공포	25	결재공문

부서명	휴양밸리산업과	담 당	서비스개발 최용진	담당자	김태영 (☏4139)

산삼휴양밸리 홍보마케팅 추진

산삼휴양밸리 개장 전 사업시설과 관광휴양상품으로서의 브랜드    가치를 홍보함으로써 주민들의 관심 유도

□ 추진방향

❍ 오픈단계에 따라 점진적인 홍보마케팅 목표 수립 및 SNS채널을 활용한 공격적 마케팅 추진

(브랜드 알리기 → 방문 수요 일깨우기 → 방문 수요 확대하기)

❍ 노출과 전달의 일방향성 홍보가 아닌 공감과 확산의 소통 홍보 추진

□ 추진내용

❍ (홈페이지 구축) 스마트폰, 태블릿, PC에서 운용이 가능한 반응형 웹을 적용해 홍보마케팅 채널로서 기능할 홈페이지 구축

❍ (홍보동영상 제작) 인지적 정보보다는 산림휴양의 욕구를 자극하고 일깨워 관심을 갖고 접근하도록 감성적 이미지 홍보동영상 제작

❍ (홍보물 제작 및 배포) 원하는 대상에게 직접적으로 홍보할 수 있고, 유관기관이나 관내 주요 관광지에 비치 및 발송

❍ (바이럴 마케팅) 입소문 인터넷 마케팅으로 소셜 네트워크(SNS) 상에서 네이버 블로그 상위노출, 카페 포스팅 등 대중의 관심 유도

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 홈페이지 구축	90%	예산집행액/예산액*100	25	에산집행실적(e-호조)
② 홍보동영상 제작	95%	예산집행액/예산액*100	25	에산집행실적(e-호조)
③ 홍보물 제작 및 배포	90%	예산집행액/예산액*100	25	에산집행실적(e-호조)
④ 바이럴 마케팅	50건	실적건수/목표건수	25	성과결과보고서

부서명	휴양밸리산업과	담 당	시설관리담당 임채진	담당자	이득수 (☏4327) 한상철 (☏4896)

산삼 휴양밸리 조성사업

❍ 산양삼을 산악관광과 접목한 휴양치유 복합관광 단지를 조성

❍ 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

□ 사업개요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 사 업 량

- 모노레일 설치 L=3.95㎞,

- 상․하부 승강장 1,263㎡(3층, 건축면적 939㎡)

- 진입도로 정비 L=2.6㎞, 주차장 및 기반정비 A=52,405㎡(507대)

□ 소요예산 : 25,000백만원(도비 20,000 군비 5,000)

□ 추진계획

❍ 2019. 3월 : 상부 암석 위험 구간 등 실정보고 후 설계 변경 검토

❍ 2019. 4월 : 상부승강장, 화장실 공사 시행

❍ 2019. 9월 : 전체준공

❍ 2019. 10월 ~ 12월 : 임시운영

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 사업비 집행 실적	2,432	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템
② 모노레일 설치 실적	100%	(설치 거리/ 계획 거리)*100	30	사업 준공도서
③ 신속집행 실적	60%	(예산집행액/ 예산현액의 60%)*100	20	지방재정관리시스템
④ 모노레일 개장 준비	100%	개장준비 여부	20	운영계획수립 보고서

부서명	휴양밸리산업과	담 당	시설운영담당 변재성	담당자	박기화 (☏4371)

거함산 항노화 휴양체험지구 산삼콤플렉스센터 건립

백두대간권(지리산, 덕유산) 관광자원을 연계한 테마형 체험관광 거점

개발로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 6월~ 2019. 8월

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 633번지 일원

❍ 소요예산 : 4,213백만원

❍ 사 업 량 : 산삼콤플렉스센터 1개동(지하1층/지상3층, 연면적 2,767㎡)

- 1층 : 상설전시장, 로비 등

- 2층 : 기획전시장, 대강의실

- 3층 : 세미나실, 교육실

- 4층 : 사무실, 통제실, 회의실

□ 추진계획

❍ 2019.  3월 : 건축공사 2차분 준공, 잔여분 공사 진행

❍ 2019.  7월 : 건축공사 완료 및 잔손보기, 현장 정리

❍ 2019.  9월 : 사업준공 및 건축물대장 등재

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 사업비 집행 실적	완료	(예산집행액/ 예산현액)*100	30	지방재정관리시스템
② 콤플렉스센터 건축공사완료	완료	준공기한 내 준공여부	30	준공검사조서
③ 신속집행 실적	60%	(예산집행액/ 예산현액의 60%)*100	20	지방재정관리시스템
④ 건축물대장 등재 및 보존등기	완료	건축물대장, 보존등기	20	건축물대장, 건물등기부등본

부서명	휴양밸리산업과	담 당	환경성질환예방담당 박미혜	담당자	고은진 (☏4196)

함양 대봉숲 힐링센터 운영

❍ 생활환경에서 발생되는 환경성질환 예방·관리 기반구축

❍ 전국 최고의 환경성질환 예방·관리 전문 교육시설로 육성

□ 사업개요

❍ 센터규모 : 연면적 2,503㎡ 지상3층

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(국3,500  도1,400  군2,100)

❍ 주요시설 : 대강당, 교육ㆍ활동실, 숙박시설, 식당 등

3층	대강당(60명 이용가능) 차훈 명상실	숙박동(58명 이용가능) -4인실 7개(28명) -10인실 3개(24명)
2층	건강배움터, 건강놀이터 건강체험존, 테라피탕(30명 이용가능)	상담검사실, 사무실
1층	The 건강한식당(60명 이용가능)	안내 로비(휴게실)

□ 추진계획

❍ 2019.  3. : 운영위원회 구성

❍ 2019. 상반기 : 건강놀이터 설치 공사 및 물품구입 등 개장준비

❍ 2019. 하반기 : 센터 시범운영 및 개장

□ 평가지표

성과지표(단위)	2019년 목표			자료수집 방법/출처	목표 달성
	목표	측정산식 또는 측정방법	비중 (100)
계
① 환경성질환교육 참여인원	200	프로그램중 환경성질환 교육 참여자 수	25	결과보고서
② 센터 전체 이용인원	1000	센터 전체 이용자 수	25	결과보고서
③ 이용자 만족도	60	센터 이용자 만족도	25	만족도조사서
④ 센터 홍보	6회	실시횟수/목표횟수	25	안내 홍보리플릿 제작, 홈페이지 배너 등