건 설 교 통 과

Ⅰ. 2015 업무추진 방향

Ⅱ. 2015 주요업무 계획

□ 주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대

□ 도로망 확충으로 지역 균형개발

□ 지역농촌의 특색을 살린 지역개발

□ 농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

□ 안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충

Ⅲ. 특수시책

□ 조동지구 신규마을 조성사업

Ⅰ		2015 업무추진 방향

건실한 건설사업시행으로 쾌적하고 살기좋은 함양건설

	전략목표
주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대 도로망 확충으로 지역 균형개발 지역농촌의 특색을 살린 지역개발과 농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상 안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충
	단위사업
지역개발 도로건설 확 ․ 포장 도로시설유지보수 농촌마을개발 및 농업생산성 확충 용수개발사업 수리시설물 개보수사업 운수업체 재정지원 교통편의시설 확충 ⑨ 불법 주․정차 단속 교통질서 확립 ⑩ 특별교통수단지원 ⑪ 대중교통육성

	Ⅱ. 2015 주요업무 계획

건설교통과 건설담당 ☏ 5191

2015 군정 주요업무

주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 추진방향 또는 개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 239개소

- 주민숙원사업 : 118개소(주민참여 19, 읍면건의 6, 주민숙원 93)

- 소규모주민숙원사업 : 91개소

- 정자 및 쉼터 유지관리사업 : 22개소

- 마을회관 및 화장실 보수 : 8개소

- 사 업 비 : 5,738백만원

- 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 생활주변 안전시설 정비사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 생활주변 안전시설 20개소

- 사 업 비 : 100백만원

- 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 55백만원

- 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2014. 12. ~ 2015. 1월

- 기본조사 및 실시설계 : 2015. 1. ~ 2월

- 사업시행 : 2015. 3. ~ 12월

❍ 생활주변 안전시설 정비사업

- 생활주변 불량시설 읍면별 전수조사 : 2014. 12월

- 사업계획 및 시행 : 2015. 2. ~ 6월

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 읍․면 1마을 선정 및 마을설명회 개최 : 2015. 1. ~ 2월

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2015. 2월

※ 담당공무원, 이장, 개발위원 협조 현장 조사

- 협의 취득 및 이전등기 : 2015. 2. ~ 12월

도로망 확충으로 지역균형개발

2015 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

❍ 지역균형 개발을 위한 도로망 구축으로 주민편익 증대

❍ 군도 및 농어촌도로의 불합리한 도로 구조로 교통사고가 빈번한 지역에 대하여 도로를 개보수 함으로써 안전사고 사전예방

□ 개    요

❍ 도로현황

- 위임국도 :   1개소  29㎞(포장 : 29㎞)

- 지  방  도 :   7개소 124㎞(포장 : 109㎞)

- 군      도 :  24개소 204㎞(포장 : 111㎞)

- 농어촌도로 : 284개소 667㎞(포장 : 329㎞)

□ 추진계획

❍ 군도 확․포장 사업

(단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고
			계	기시행	2015년	2016년이후
계	3개소	3.4	6,200	916	543	4,741
원구～거면(군도4호)	함양 구룡	0.4	1,200	-	200	1,000	계속
구룡～옥환(군도9호) (원산~지소)	병곡 원산	2.0	2,760	916	200	1,644	계속
송계～노상(군도21호)	서하 송계	1.0	2,240		143	2,097	신규 (용역)

- 추진일정

․ 2015.  1 ~ 2월 : 관련부서 협의(산지, 농지, 군계획시설 결정) 등

․ 2015.  1 ~ 6월 : 보상협의 및 사업시행

․ 2015. 11월 : 사업완료

❍ 농어촌도로 확․포장사업                               (단위:km/백만원)

2015 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

사업명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2015년	2016년이후
계	12개소	9.8	20,706	2,266	1,360	17,080
가덕선	마천 가흥	0.6	774	674	100	-	계속
동상선(하비)	안의 신안	1.0	1,395	1,195	100	100	계속
대안선	백전 대안	0.8	2,000	50	100	1,850	계속
이장선	안의 이전	1.0	2,300	50	100	2,150	계속
임산선	휴천 호산	0.6	600	250	100	250	계속
신촌선	백전 백운	0.8	1,000	17	200	783	계속
실도선(도마)	마천 덕전	1.6	2,400	30	100	2,270	계속
백무선	마천 덕전	0.4	200		200	-	신규
운죽선	함양 교산	0.9	4,700	-	138	4,562	신규(용역)
신각선	병곡 옥계	1.0	1,437	-	121	1,316	신규(용역)
유회선	유림 서주	0.7	2,300	-	62	2,238	신규(용역)
운평선	백전 양백	0.4	1,600	-	39	1,561	신규(용역)

- 추진일정

․ 2015. 1. ~ 5월 : 실시설계 및 보상협의

․ 2015. 6. ~ 11월 : 사업시행 및 추진

․ 2015. 11월 : 사업완료

❍ 어린이 보호구역 개선사업

- 사업구분 : 광특회계사업(광역발전계정)

- 위    치 : 함양군 일원(11개 읍면)

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월(1년간)

- 사 업 량 : 도로 교통안전시설 및 차선도색 1식

- 사 업 비 : 60백만원(국비 50%, 지방비 50%)

- 투자계획                                             (단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2015 계획		2016년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	교통안전시설, 차선도색	1,720	교통안전시설, 차선도색	1,140	교통안전 시설, 차선도색	60	교통안전시설, 차선도색	520
국 비		860		570		30		260
도 비
군 비		860		570		30		260

- 추진일정

2015 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

․ 2015. 1. ~ 2월 : 실시설계

․ 2015. 3월 : 사업시행

․ 2015. 9월 : 사업완료

❍ 위험도로 구조개선사업

- 사업구분 : 광특회계사업(광역발전계정)

- 위    치 : 함양군 수동면 우명리 일원(농어촌도로 101호)

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월(1년간)

- 사 업 량 : 위험도로 개․보수 L=0.4㎞

- 사 업 비 : 200백만원(국비 50%, 지방비 50%)

- 투자계획                                           (단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2015 계획		2016년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	개보수 L=0.4㎞	200		-	개보수 L=0.4㎞	200		-
국 비		100		-		100		-
도 비
군 비		100		-		100		-

- 추진일정

․ 2015. 1. ~ 2월 : 실시설계

․ 2015. 3월 : 사업시행

․ 2015. 9월 : 사업완료

❍ 안전한 보행환경 조성사업

- 사업구분 : 지특회계사업(광역발전계정)

- 위    치 : 함양군 함양읍외 2개면

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월(1년간)

- 사 업 량 : 보도신설외 4개사업

(보도신설 100m, 횡단보도 10개소, 볼라드 8개소, 보도폭 확장 1개소)

- 사 업 비 : 400백만원(국비 50%, 지방비 50%)

- 예산계획                                            (단위 : 백만원)

구 분	합 계		기투자		2015 계획		2016년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	보행자길 1식	400		-	보행자길 1식	400		-
국 비		200		-		200		-
군 비		200		-		200		-

2015 군정 주요업무

건설교통과 도로담당 ☏ 5192

- 추진일정

․ 2015. 1. ~ 3월 : 실시설계용역 시행

․ 2015. 3. ~ 12월 : 사업시행

․ 2015. 12월 : 사업완료

❍ 도로 개․보수사업(군도, 농어촌도로)

- 위  치 : 함양군 관내

- 사업량 : 5개소 L=0.5㎞(배수로 정비 및 법면보강사업)

- 사업비 : 250백만원

- 추진일정

․ 2015. 1. ~ 2월 : 실시설계 용역 시행

․ 2015. 3. ~ 10월 : 사업시행

․ 2015. 11월 : 사업완료

❍ 도로 및 교량 유지보수

- 위     치 : 군 관내일원

- 사 업 량 : 교량안전진단 외 4개 사업

- 사 업 비 : 300백만원

- 시설현황 : 470(국도 1, 지방도 7, 군도 24, 농어촌도로 284, 교량 154)

- 유지관리비(군도, 농어촌도로)                       (단위 : ㎞/백만원)

합 계		도로유지관리		표 지 판		교 량		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
풀베기1식 차선도색1식 표지판1식 교량진단 및보수1식	300	풀베기 L=100km, 차선도색 L=50km	100	표지판 정비 50개소	50	교량진단 4개소, 교량보수 5개소	150
			50 50		50		100 50

※ 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거 2종 시설물은 2년 주기 안전진단 실시

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

지역농촌의 특색을 살린 지역개발

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

❍ 농촌마을개발 및 농업생산성 확충

- 권역단위 종합정비사업                                (단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업기간	사 업 비				비 고
			합 계	2014년 까지	2015년	2016년 이후
합 계	7권역		19,740	4,532	3,906	11,302
오매실권역	백전면 대안리 구산리	2012 ～ 2015년	3,142	2,827	315		2012년 (농촌공사)
봉전권역	서하면 봉전리	2013 ～ 2016년	4,247	1,002	1,201	2,044	2013년 (농촌공사)
삼동권역	병곡면 옥계리	2014 ～ 2017년	3,410	348	720	2,342	2014년 (군 직영)
죽림권역	함양읍 죽림리	2014 ～ 2017년	3,519	355	720	2,444	2014년 (농촌공사)
덕암권역	지곡면 덕암리	2015 ～ 2018년	3,962		568	3,394	2015년 (농촌공사)
운서권역	휴천면 운서리	2015 ～ 2018년	991		195	796	2015년 (군 직영)
원기권역 (경관생태)	휴천면 남호리	2015 ～ 2016년	469		187	282	2015년 (군 직영)

※ 재원 비율(지특 70%, 도비 9%, 군비 21%,  기타 436백만원)

- 권역단위 종합정비사업 추진실적 및 계획

․ 오매실권역 종합정비사업 시행계획 수립             : 2013.  9월

․ 봉전권역 종합개발사업 시행계획 수립               : 2014.  9월

․ 삼동권역 종합개발사업 기본계획 수립               : 2014.  9월

․ 봉전권역 종합개발사업 하드웨어 사업 착공         : 2014. 10월

․ 죽림권역 종합개발사업 시행계획 수립 및 착공       : 2015.  1월

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

․ 삼동권역 종합개발사업 시행계획 수립 및 착공       : 2015.  1월

․ 2015년 신규사업(덕암, 운서, 원기권역) 기본계획용역 착수 : 2015.  2월

․ 2015년 신규사업(덕암, 운서, 원기권역) 기본계획 수립   : 2015.  7월

․ 2015년 신규사업(덕암, 운서, 원기권역) 실시설계용역 착수 : 2015.  8월

․ 2015년 신규사업(덕암, 운서, 원기권역) 시행계획 수립    : 2015. 12월

․ 오매실권역 종합개발사업 준공                       : 2015. 12월

․ 덕암, 운서권역 종합정비 하드웨어사업 착공        : 2016.  2월

- 읍․면소재지 종합정비사업                             (단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2014년까지	2015년	2016년이후
합 계			32,631	8,690	9,362	14,579
유림면	유림면 화촌리 서주리	2012년~ 2015년	3,634	3,255	379	-	2012년 (농촌공사)
서상면	서상면 도천리 대남리	2012년~ 2015년	3,250	2,053	1,197	-	2012년 (농촌공사)
마천면	마천면 가흥리	2013년~ 2016년	6,780	1,355	2,490	2,935	2013년 (군직영)
지곡면	지곡면 개평리 창평리	2013년~ 2016년	6,650	1,336	3,023	2,291	2013년 (농촌공사)
휴천면	함양읍 목현리	2014년~ 2017년	6,447	691	1,450	4,306	2014년 (군 직영)
백전면	백전면 평정리	2015년~ 2018년	5,870	-	823	5,047	2015년 (군 직영)

※ 재원 비율(광특 70%, 도비 9%, 군비 21%, 기타 90백만원)

- 읍․면소재지 종합정비사업 추진실적 및 계획

․ 유림면소재지 종합정비사업 시행계획 수립  : 2013. 10월

․ 서상면소재지 종합정비사업 시행계획 수립  : 2013.  9월

․ 지곡면소재지 종합정비사업 시행계획 수립  : 2014.  9월

․ 휴천면소재지 종합정비사업 기본계획 수립  : 2014.  9월

․ 마천면소재지 종합정비사업 시행계획 수립  : 2014. 10월

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

․ 지곡면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공  : 2014. 10월

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

․ 휴천면소재지 종합정비사업 시행계획 수립         : 2015.  2월

․ 마천면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공         : 2015.  2월

․ 2015년 신규사업(백전면소재지) 기본계획 용역 착수 : 2015.  2월

․ 2015년 신규사업(백전면소재지) 기본계획 수립      : 2015.  8월

․ 2015년 신규사업(백전면소재지) 시행계획 수립      : 2015. 12월

․ 유림면소재지 종합정비사업 준공                  : 2015. 12월

․ 서상면소재지 종합정비사업 준공                  : 2015. 12월

․ 백전면소재지 종합정비 하드웨어사업 착공         : 2016.  2월

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

❍ 가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등 수리시설을 설치하여  농촌용수를 확보·공급함으로써 식량의 안정적 생산기반 구축

❍ 생산기반이 취약한 집단화 된 밭을 대상으로 기반시설정비로 농가소득 증대기여

❍ 재해 위험 저수지 정비를 통한 재해 사전 예방

❍ 용수개발사업

- 소규모 농업용수개발

․ 위    치 : 병곡면 광평리 일원

․ 사업기간 : 2010 ~ 2015년(6년)

․ 사 업 량 : 저수지 신설(제당 L=145m, H=37m) ※ 저수량 : 219천톤

․ 사 업 비 : 8,686백만원(광특 70%, 도비 15%, 군비 15%)

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2014년까지	2015년	2016년이후
합 계	8,686	7,293	1,393	-
광 특	6,046	5,071	975	-
도 비	1,320	1,111	209	-
군 비	1,320	1,111	209	-

․ 추진실적 및 계획

⁚ 기본조사 설계용역 완료 : 2011.  4월

⁚ 실시 설계용역 완료     : 2011.  9월

⁚ 시행계획 승인          : 2011. 10월

⁚ 사업 착공              : 2011. 12월(종합진도 : 80%)

⁚ 마평지구 소규모 농촌용수개발사업 완료 : 2015. 5월

⁚ 마평 저수지 유지관리 계획 수립 : 2015. 6월

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

2015 군정 주요업무

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반담당 ☏ 5193

❍ 밭기반 시설 정비

- 위    치 : 서상면 옥산리, 대남리 일원

- 사업기간 : 2010 ~ 2016년(7개년)

- 사 업 량 : 암반관정개발 3개소, 농로 L=2.5km, 용수공급 1식

- 사 업 비 : 1,654백만원(광특 80%, 도비 10%, 군비 10%)   (단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2014년까지	2015년	2016년이후
합 계	1,653	1,326	125	202
광 특	1,323	1,060	100	163
도 비	165	133	13	19
군 비	165	133	12	20

- 추진실적 및 계획
․ 기본계획 수립       : 2008. 10월

․ 사업착공            : 2011년

․ 5차년(토목)공사 착공 : 2015.  2월(종합진도율 85%)

․ 사업완료            : 2015. 12월

․ 보    상           : 2016. 12월

❍ 수리시설물 개보수

- 사업개요

․ 대    상 : 재해위험저수지 8개소(유평외 7개소)

․ 사업기간 : 2015 ~ 2017년

․ 사 업 량 : 노후 제당 및 복통 보수․보강

․ 사 업 비 : 3,375백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

․ 세부사업내역                                       (단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비			비 고
	계	2015년	2016년이후
합 계	1,653	575	2,800
국 비	1,688	288	1,400
도 비	506	86	420
군 비	1,181	201	980

2015 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충

❍ 여객업체 운영손실 재정지원으로 경영안정과 대중교통 활성화 도모

❍ 교통안전시설물 설치 및 체계적인 관리로 선진교통 인프라 구축

❍ 보행자와 운전자의 안전사고 방지 및 쾌적한 교통환경 조성

❍ 읍내 노후화 된 주․정차 구역 내 교통시설물 정비와 시설 현대화

❍ 주․정차 구역 내 이용자의 자발적 주차질서 확립유도

❍ 교통약자의 이동편의 증진을 위한 특별 교통수단 운영

❍ 대중교통 이용시설 이용객의 편의증진 도모

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월

❍ 지원대상 : 운수업체(버스45, 택시118, 화물142대, 전세버스17대)

❍ 사 업 비 : 3,599백만원

□ 추진계획

❍ 운수업체 재정지원 : 운수업체 재정지원 대중교통 활성화

- 운수업계 유가보조금 지원(305대) : 1,100백만원

- 농어촌 버스업계 재정지원(2개업체) : 565백만원

- 벽지노선 손실보상금 지원(2개업체) : 750백만원

- 벽지노선 공영버스 구입(3대) : 264백만원

- 버스외벽 홍보물 설치(시외13대) : 16백만원

- 버스외벽 함양군 관광홍보물 설치(2개업체) : 26백만원

- 택시외부 광고를 통한 함양홍보(118대) : 142백만원

- 택시 외부광고 제작비 : 10백만원

- 택시 요금 카드결재기 설치지원(118대) : 38백만원

- 벽지노선 교통량 조사(60명) : 27백만원

2015 군정 주요업무

건설교통과 교통행정담당 ☏ 5194

❍ 농촌형교통모델발굴사업 : 버스 미 운행마을 택시 운영

- 행복택시 운영비지원(8개마을) : 150백만원

❍ 교통편의시설 확충 : 보행자와 운전자의 안전사고 방지

- 버스승강장 설치/도색(5개소/17개소) : 53백만원

- 교통안전시설물 설치(반사경 등)(50개소) : 25백만원

- 무인단속카메라 설치(3개소) : 75백만원

- 교통신호등(경보등) 신설 : 15백만원

- 태양광 싸이키 경광등 교체사업(5개소) : 10백만원

- 서상 택시승강장 개선사업(1식) : 20백만원

- 수동 공용주차장 개선사업(1식) : 20백만원

- 교통시설물 유지보수 사업(1식) : 32백만원

- 서상 다목적공원 및 주차장 조성사업(1식) : 30백만원

❍ 불법 주․정차 단속 : 주․정차 구역내 이용자의 자발적 주차질서 확립 유도

- 읍내 주․정차 금지구역 시설 개선 : 50백만원

- 주․정차 단속장비(CCTV)보수 : 31백만원

❍ 특별교통수단지원 : 교통약자의 이동편의 증진을 위한 콜택시 운영

- 교통약자를 위한 콜택시 운영(4대) : 130백만원

- 특별교통수단 유료도로 통행료 지원(4대) : 2백만원

❍ 대중교통육성(단위사업) : 터미널 이용객을 위한 교통편의 증진

- 안의시외버스 터미널 운영비 지원(1식) : 18백만원

	Ⅲ. 특수시책

2015 군정 주요업무

건설교통과 농업기반 ☏ 5193

조동지구 신규마을 조성사업

(농촌형 임대주택 시범사업)

❍ 농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌유입 촉진으로 농촌지역 활성화 도모

❍ 보산지구 전원마을의 성공적 사례를 바탕으로 우리군 특성에 맞는 마을을 조성하여 여유롭고 쾌적한 삶의 공간 제공

□ 개    요

❍ 위    치 : 함양읍 구룡리 662-10번지 일원

❍ 사업기간 : 2012 ∼ 2016년(5년)

❍ 사 업 량 : 전원마을 조성(면적 30,928㎡, 계획가구수 30세대)

❍ 사 업 비 : 총사업비 4,500백만원(국비 3,000  군비 1,500)

□ 추진실적 및 계획

❍ 임대주택 시범사업 의향서 제출 : 2014. 10월

❍ 시범사업 대상지 선정 : 2014. 12월

❍ 임대주택 조형선정 및 실시설계 : 2015. 3월

❍ 사업착공 : 2015.

❍ 주택분양 : 2016. 6월