문 화 관 광 과

Ⅰ. 2018 업무추진 방향	131

Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 디지털 함양문화대전 편찬	135

□ 화과원 국가사적지 지정 추진	136

□ 함양 남계서원 세계문화유산등재 추진	137

□ 전통문화 체험 학습장 시설 개선사업	138

□ 함양 알리미 관광콘텐츠 개발	139

□ 머무르는 관광객 유치	140

□ 죽곡유원지 조성	141

□ 함양 볼링장 건립사업	142

□ 마천면 전천후 게이트볼장 건립	143

2. 역점(특수)시책

□ 함양문화원 건립	144

□ 함양도서관 이전건립	145

□ 두뇌스포츠 바둑 활성화	146

3. 일반계속사업

□ 제43회 대한민국 관악경연대회	147

□ 문화예술행사 활성화	148

□ 문화재 및 문화유산의 체계적 관리	149

□ 함양관광 활성화	150

□ 관광시설물 유지관리	151

□ 최치원 역사공원 조성	152

□ 지리산 생태체험단지 조성	153

□ 선비문화공원 조성	154

□ 농월정 관광지 정비	155

□ 백연유원지 조성	156

□ 용추계곡 물따라 걷는길 조성	157

□ 청암산~백무동 자락길 조성	158

□ 지리산 당흥마을 생태탐방로 조성	159

□ 체육진흥을 통한 건강한 함양 조성	160

□ 함양 스포츠파크 조성	161

□ 상림공원 유지관리	162

□ 천년의숲 상림 생육환경개선사업	163

Ⅰ		2018 업무추진 방향

문화가 풍성한 함양군 조성

	전략목표
문화참여 기회 확대로 문화격차 해소 문화유산 보존 강화 및 활용 증진 연 5백만명 관광객 유치시대 개막 관광 인프라 확충으로 지역경제 활성화 스포츠 활성화로 건강한 삶 구현 상림공원의 체계적 관리
	단위사업
생활문화 여건 조성 ⇨ 함양물레방아골축제, 토요무대 운영 등 ➁ 문화 기반시설 확충 ⇨ 문화원 건립, 도서관 이전 건립 등 ➂ 문화유산 보전 관리 ⇨ 보물, 사적, 천연기념물 등 ➃ 역사와 문화가 어우러진 관광명소 조성 ⇨ 최치원 역사공원, 남계서원 등 ➄ 전략적 관광 홍보 ⇨ 팸투어, 시티투어, 관광박람회 참가 등 ➅ 다양한 관광자원 개발 ⇨ 상림주변 관광개발, 지리산 생태체험단지 등 ➆ 공공체육 기반시설 확충 ⇨ 스포츠 파크, 소규모 체육시설 등 ➇ 스포츠 마케팅 강화 ⇨ 전국 규모 체육경기대회 개최, 전지훈련 유치 ➈ 상림공원 관리 ⇨ 상림을 후세 천년의 숲으로 보존 관리

	Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1

1

디지털 함양문화대전 편찬

문화예술담당 ☏ 5161

신규사업

❍ 향토문화 자료를 체계적으로 집대성하고 디지털화, 적극적으로 보존 활용

❍ 급속히 변화하는 문화환경과 이용자의 요구수준을 고려, 콘텐츠 현행화

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2017. 11월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 량 : 디지털함양문화대전 편찬 1식

❍ 시행기관 : 한국학중앙연구원

❍ 사업내용 : 역사, 문화유산, 성씨/인물, 정치/경제/사회, 종교 등 9종

❍ 사 업 비 : 500,000천원 (국비 150,000, 군비 350,000)

(단위 : 백만원)

구분	총계	2017년까지	2018년	2019년
계	500	180	160	160
군비	350	30	160	160
한국학중앙연구원	150	150	0	0

□ 추진계획

❍ 한국학중앙연구원 협약 체결 : 2017. 11월

❍ 기초조사 : 2017. 11월 ~ 12월

❍ 사업착공 : 2018. 1월

❍ 사업준공 : 2019. 12월

□ 기대효과

❍ 향토문화 자료의 디지털화로 체계적 관리, 보존

❍ 지역문화에 관한 정보 및 문화기술 사업의 발달 도모

1

2

화과원 국가사적지 지정 추진

문화재담당 ☏ 5162

신규사업

경상남도 기념물 제229호인‘함양 백용성선사 화과원 유허지’의 국가

사적지 지정 추진을 통해 화과원의 역사ㆍ문화적 위상과 가치 재발견

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2017. 12월 ~ 2018. 8월

❍ 대상위치 : 함양군 백전면 백운리 50번지 외

❍ 사업내용 : 국가사적지 지정 위한 학술세미나 개최 및 연구용역 시행

❍ 사 업 비 : 45백만원

❍ 사 업 량 : 연구용역 1식

□ 추진계획

❍ 2017년 12월 : 용역 발주

❍ 2018년 1월 ~ 5월 : 용역시행

❍ 2018년 6월 : 용역보고회, 주민설명회 개최

❍ 2018년 7월 : 신청서 제출(도 경유 문화재청)

❍ 2018년 8월 : 문화재청 심사 제출(도 경유 문화재청)

❍ 2019년 : 3.1운동 100주년 기념 국책사업연계 국가사적지 지정 추진

□ 기대효과

❍ 화과원의 역사·문화적 위상과 가치 재발견

1

3

함양 남계서원 세계문화유산 등재 추진

문화재담당 ☏ 5162

신규사업

함양 남계서원의 2019년 세계문화유산 등재를 위해, 관광객 편의 및   원활한 서원관리를 위하여 광장 조성

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. 1월 ~ 6월

❍ 장    소 : 함양군 수동면 원평리 586번지 일원

❍ 사업내용 : 잔디블럭 광장조성,

❍ 사 업 비 : 160백만원

❍ 사 업 량 : 잔디블럭 광장 1,126㎡

□ 추진계획

❍ 2018년 2월 : 실시설계

❍ 2018년 3월 ~ 4월 : 문화재청 현상변경 허가

❍ 2018년 5월 ~ 6월 : 사업시행

□ 기대효과

❍ 세계 문화유산 등재 준비 및 소중한 문화유산 보존

❍ 관광객에게 편의시설을 제공함으로 관광의 만족도 제고

□ 건    의

❍ 함양 남계서원 주변 정비사업의 추진을 위해 2018년 소요사업비 160백만원 반영 건의

1

4

전통문화 체험 학습장 시설 개선사업

관광콘텐츠담당 ☏ 5163

신규사업

선비문화탐방로 중앙광장을 개선하여 교육, 체험, 전시 등 관광활성화

및 머무르는 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서하면 봉전리 858번지 일원

❍ 사업내용 : 선비문화체험 학습장 시설개선

(본관건물 2층 증축, 543.87㎡)

❍ 사업기간 : 2018년

❍ 사 업 비 : 1,000백만원

(단위:백만원)

구 분	계	2017년까지	2018년	2019년이후
계	1,000	-	1,000	-
국 비	300	-	300	-
도 비	90	-	90	-
군 비	610	-	610	-

□ 추진계획

❍ 2018. 1월 : 실시설계

❍ 2018. 3월 : 사업 착공

❍ 2018. 6월 : 준공

□ 기대효과

❍ 선비문화 체험 학습장 시설 개선으로 머무르는 관광객 유치가 증가 하여 지역경제 활성화 및 함양 관광 이미지 개선에 기여

1

5

함양 알리미 관광콘텐츠 개발

관광콘텐츠담당 ☏ 5163

신규사업

함양 알리미 관광콘텐츠 개발로 우리군 관광명소와 2020 함양산삼

항노화엑스포를 홍보코자 함

□ 사업개요

사 업 명	사업내역	소요예산
계		115
찾아가는 관광홍보관 운영	관광홍보 전용 특장차렌탈 1대 홍보물품제작 등	30
스마트 스탬프 투어	앱구축 1식, 기념품제작 등	20
벽화마을 조성	마을 및 학교 담장 2개소	40
영상편지 촬영장 운영	촬영기 설치 1개소	25

□ 추진계획

❍ 2018. 1월

- 관광홍보관 운영 및 영상편지 촬영장 업체 선정 및 계약

- 스탬프투어 앱 개발업체 선정 계약

❍ 2018. 2월

- 찾아가는 관광홍보관 장소 선정(주요축제 및 행사장)

- 영상편지 촬영장 설치

- 스마트 스탬프 투어 시행

□ 기대효과

❍ 이동식 홍보관(차량) 운영으로 현장중심 잠재고객 확보

❍ 마을 담장 등 유휴자원을 활용한 특색 있는 관광자원 개발

❍ 관광객 직접 참여 제작 영상편지를 지인들에게 전달하는

방법으로 최상의 광고 효과

1

6

머무르는 관광객 유치

관광콘텐츠담당 ☏ 5163

신규사업

❍ 함양을 스쳐가는 관광지에서 머무르는 관광지로 도약시키기

위한 가족단위 관광객과 수학여행단을 사로잡을 프로그램 및

관광 인프라 구축

❍ 사계절 관광객 유치를 위한 공격적인 홍보

□ 사업개요

❍ 기    간 : 연중

❍ 사업내용 : 우리군 소유 숙박형 관광시설 활성화 및 홍보

❍ 시설현황

구분	시설명	숙박시설	수용인원 (1일)	위탁관리자
체험학습장	다볕자연학교	한옥황토방:9동 연수원동:6동	100명	㈜다볕
캠핑장	농월정오토캠핑장	캐빈하우스:6동 캠핑장사이트:25면	124명	방정마을 물내리영농조합법인
캠핑장	용추오토캠핑장	캐빈하우스:7동 캠핑장사이트:28면	140명	김○○(개인)

□ 추진계획

❍ 깨끗한 시설관리 및 정비 : 관광시설물 유지보수비 활용

❍ 수학여행단 유치 각급학교, 시 도 교육청, 여행사 등 홍보공문

발송 및 한국중등교장협의회 연수회 참여 홍보

❍ 캠프·체험형 수학여행 프로그램 개발 : 위탁관리자와 협의

❍ 언론매체 활용 홍보용 보도자료 수시 배포

□ 기대효과

❍ 스쳐가는 관광에서 머무르는 관광으로 변화시켜 지역경제 활성화에 기여

1

7

죽곡유원지 조성

관광시설담당 ☏ 5165

신규사업

위천 주변 솔숲 등 자연과 어우러진 캠핑장과 물놀이시설 조성으로    다채롭고 특색있는 함양의 힐링 캠핑공간 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 죽곡리 160번지 일원

❍ 면    적 : 167,120㎡

❍ 사업내용 : 오토캠핑장, 애견캠핑장, 물놀이풀장, 주차장(171대)

❍ 사 업 비 : 28,343백만원(지특 9,025, 도 2,708, 군 16,610)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		2019년 이후		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	28,343	기본계획, 군관리계획 (확장)용역	122	실시설계 토지보상		캠핑장조성 1식	28,221
지특	9,025						9,025
도비	2,708						2,708
군비	16,610		122				16,488

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

□ 추진실적

❍ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행 : 2017. 4월

❍ 군관리계획 결정(변경) 용역(구역확장) 시행 : 2017. 11월

□ 추진계획

❍ 지방재정 투자심사 의뢰(중앙) : 2018. 1월

❍ 실시설계 용역 시행 : 2018. 3월

❍ 편입부지 보상 협의(18년 추경예산 확보) : 2018. 3월

❍ 국비(지특) 예산 신청 : 2019. 4월

❍ 사업 착공 : 2020. 1월

□ 기대효과

❍ 캠핑족의 다양한 수요에 맞춰 물놀이풀장, 애견캠핑장, 카라반캠핑장 등 다채로운 캠핑공간 조성으로 관광객 증가 기대

1

8

함양 볼링장 건립사업

체육담당 ☏ 5164

신규사업

❍ 볼링 동호인 인구 증가에 따른 체육인프라 구축

❍ 전지훈련 유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 638-1번지 일원

❍ 사업내용 : 실내볼링장 1식(철골조 조립식 판넬 1층 1,000㎡),

기존 인라인스케이트장 철거 1식 등

❍ 사 업 비 : 2,000백만원

(단위:백만원)

구 분	계	2017년까지	2018년	2019년이후
계	2,000	1,000	1,000
국 비	-	-	-
도 비	1,000	1,000	-
군 비	1,000	-	1,000

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

□ 추진실적

❍ 각종 용역사업 착수 및 완료 : 2017. 7월 ~ 2017. 11월

❍ 경상남도 계약심사 요구 : 2017. 12월

❍ 군계획시설(체육시설) 세부시설 결정 : 2017. 12월

❍ 실시계획 인가(관련 인허가 신청) : 2017. 12월

□ 추진계획

❍ 경남도 건설기술심의 및 계약심사 요구 : 2018. 1월

❍ 사업 착공 : 2018. 2월

❍ 사업 준공 : 2018. 12월

1

9

마천면 전천후 게이트볼장 건립

체육담당 ☏ 5164

신규사업

현 게이트볼장 시설이 토사구장으로 시설이용과 관리에 애로가 있으며

기존부지 협소와 부대시설 미비로 이용에 불편함이 있어 전천후

게이트볼장 이전 건립 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 마천면 가흥리 596-1번지외 1필지

❍ 사 업 량 : 부지 2,032㎡, 전천후 게이트볼장 1동(철골조 500㎡)

❍ 사 업 비 : 993백만원

(단위:백만원)

구 분	계	2018년	2019년
사업비	993	400	593
사업내역	용역비, 보상비 공사비	용역비, 보상비	공사비

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

□ 추진계획

❍ 토지감정 평가 및 보상 협의 : 2018. 1월 ~ 3월

❍ 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 2월 ~ 6월

❍ 건축허가 및 실시계획인가 등 인허가 협의 : 2018. 8월

❍ 사업 추진 : 2019. 1월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 연중 사용 가능한 노인여가시설 확보로 건강증진 기회 제공

❍ 전천후 체육시설(휴게시설 등 포함) 확충으로 게이트볼 활성화 기여

1

1

함양문화원 건립

문화예술담당 ☏ 5161

역점 및 특수시책

향토문화의 계승·발전과 함양문화원 건립을 통해 군민의 문화수요 충족

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 337번지 일원

❍ 사업규모 : 부지 2,668㎡, 건물 1,699.52㎡(지하1층, 지상3층)

❍ 주요시설 : 전시실(146.91㎡), 도서실(71.40㎡), 공연장(264.18㎡)

❍ 사 업 비 : 4,616백만원(국비 1,846, 군비 2,770)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

□ 추진실적

❍ 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2014. 2월

❍ 도 지방재정 투자심사 심사 승인 : 2016. 5월

❍ 문체부 사전평가 심사(적정) : 2017. 4월

❍ 국비(1,531백만원) 확보 : 2017. 4월

❍ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2017. 10월

□ 추진계획

❍ 사업 착공 : 2018. 1월

❍ 사업 준공 : 2019. 12월

□ 기대효과

❍ 지역전통문화 계승‧발전을 위한 전략적 거점 확보

❍ 변화되는 트렌드에 적극 대응하여 군민 문화욕구 해소에 기여

1

2

함양도서관 이전 건립

문화예술담당 ☏ 5161

역점 및 특수시책

도서관 이용객 증가 및 군민 서비스 수요 충족을 위해 군민의 문화   수준에 맞는 현대식 맞춤형 도서관 건립 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 (함양교육지원청 인근)

❍ 사 업 량 : 부지 3,000㎡, 건물 2,000㎡(지하 1층, 지상 3층)

❍ 사 업 비 : 12,000백만원

- 보상비 : 5,000백만원, 공사비 7,000백만원

※ 타당성 조사 용역비 확보 25백만원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

□ 추진실적 및 계획

❍ 용역비 예산확보 : 2017. 1월

❍ 함양교육청과 부지확보 방안 논의 : 2017. 4월 ~ 9월

❍ 청소년 문화의 집과 도서관의 융복합 센터 건립 방안 협의 : 2017. 12월

❍ 사전평가 대비 컨설팅 및 투융자 심사 : 2018. 3월

❍ 관리계획 수립 및 부지확보 : 2018. 4월

❍ 국도비 신청 : 2018. 4월

□ 기대효과

❍ 군민을 위한 다양한 프로그램 운영으로 군민 문화의식 수준 향상

1

3

두뇌 스포츠 바둑 활성화

체육담당 ☏ 5164

역점 및 특수시책

❍ 두뇌 스포츠인 바둑의 활성화로 군민들의 정신건강과 정서함양

❍ 사초 노석영 선생의 업적을 기리고 바둑대회 및 바둑교실 운영

활성화로 바둑 저변확대 기여

□ 사업개요

❍ 바둑교실 운영(일반인) : 2018년 연중

❍ 방과 후 바둑교실 운영(초·중·고)  : 2018년 연중

❍ 함양군민 바둑대회 개최(일반·학생·여성부 등) : 2018년 7월중

❍ 노사초배 전국 바둑대회 개최 : 2018년 8월중

※ 총 소요예산 : 125백만원

□ 추진계획

❍ 바둑교실 운영(일반인, 초·중·고) : 2018년 1월 ~ 12월

❍ 함양군민 바둑대회, 노사초배 준비 : 2018년 4월 ~ 6월

❍ 함양군민 바둑대회, 노사초배 개최 : 2018년 7월 ~ 9월

□ 기대효과

❍ 연중 바둑교실 운영으로 바둑문화 저변확대 기여

❍ 후진양성을 통하여 세계적인 바둑선수 육성 및 기반 조성

❍ 노사초배 바둑대회의 활성화로 전국 최고의 바둑대회로 자리매김

1

1

제43회 대한민국 관악경연대회 개최

문화예술담당 ☏ 5161

일반계속사업

❍ 내방객 유치로 우리 군을 알릴 수 있는 기회 및 지역경제 활성화 기여 ❍ 윈드오케스트라의 고장으로 자리매김 할 수 있는 여건조성

□ 행사개요

❍ 기    간 : 2018. 9월중(축제기간과 연계)

❍ 장    소 : 문화예술회관 대공연장

❍ 참가인원 : 15,000명정도

❍ 참가단체 : 150개 단체(초.중.고, 일반)

❍ 소요예산 : 150백만원(도비 50, 군비 50, 자부담 50)

❍ 주최/주관 : 한국관악협회/(사)다볕문화

□ 추진계획

❍ 대회 개최계획 수립 : 2017. 12월

❍ 대회진행 집행본부 구성 : 2018. 3월

❍ 참가신청서 접수 : 2018. 5월

❍ 관람객 유치를 위한 홍보 : 2018. 6월 ~ 8월

❍ 관악경연대회 개최 : 2018. 9월

□ 기대효과

❍ 지역 문화예술 발전 및 지역경제 활성화

❍ 군민에 대한 문화예술 향유기회 확대

❍ 다볕유스윈드오케스트라의 전국적 위상 제고

1

2

문화예술행사 활성화

문화예술담당 ☏ 5161

일반계속사업

다양한 문화예술 행사 개최․지원으로 군민화합을 실현하고 상생․

소통의 장을 마련하여 지역문화 활성화 기여

□ 추진계획

(단위:백만원)

구 분	내 용	소요예산
계		1,069
함양물레방아골축제	축제행사 지원	299
함양문화원 지원	문화학교 운영, 학술회의 등 5개부분	170
함양예총 등 회원단체 지원	예총제 개최 및 지부 정기전시(연주)회 등 11개부문	95
창작역량 강화를 위한 문화예술 단체 지원	문학제, 관현악단 정기연주회 등 16개부문	248
소외계층 문화복지 지원	통합문화이용권	30
추모제향	서원제향, 향교춘추석전제 등 12개부분	51
전통문화계승	정월대보름 행사, 읍면농악대 지원 2개부분	52
상림 야외무대 운영	음향장비 임차 및 참가자 보상금	30
노래교실 활성화	경연대회, 노래교실 운영	94

□ 기대효과

❍ 지역 문화예술의 계승·발전 도모

❍ 군민의 문화예술 향유 기회 확대

1

3

문화재 및 문화유산의 체계적 관리

문화재담당 ☏ 5162

일반계속사업

훼손된 문화재의 보수를 통한 문화유산의 원형을 보존 관리하여

후손들에게 전승함으로서 우리 고장의 문화유산에 대한 자긍심 고취

□ 사업개요

❍ 문화재 및 전통사찰 보수

- 사업현황                                          (단위:백만원)

계		국가지정		도지정		전통사찰
개소	금액	개소	금액	개소	금액	개소	금액
31	2,516	13	1,518	12	628	6	370

- 사 업 비 : 2,516백만원(국 1,214  도 546 군 690 자부담 66)

❍ 문화유적지 정비

- 대    상 : 문태서 및 노응규 의병장 생가 관리, 남계서원 관리

문화재 안내판 설치, 재난대비 긴급 보수

- 소요예산 : 276백만원

□ 추진계획

❍ 보수공사 실시설계 및 방재사업 사업계획 검토  : 2017. 11월 ~ 2018년 1월

❍ 문화재청 및 경남도청 설계승인 : 2018. 1월 ~ 2월

❍ 공사시행 : 2018. 3월 ~ 12월

1

4

함양관광 활성화

관광콘텐츠담당 ☏ 5163

일반계속사업

우리군 관광명소의 홍보와 축제 및 관광상품 개발로 국내·외 관광객

유치를 통한 함양관광 이미지 제고

□ 추진계획

❍ 관광홍보 및 마케팅

(단위:백만원)

구 분	시 기	수 량	2018예산
계			170
관광기념품․홍보물 제작	연중	각 4종	60
관광 팸투어	8월	1회	20
관광객유치 인센티브제	연중	-	10
관광박람회 홍보관 운영	2,3,9월	3회	15
관광안내 표지판 정비	연중	6개소	40
시티투어 운영	연중	-	15
선비문화 탐방로 걷기대회	10월	1회	10

❍ 주요 관광지 안내소 운영 : 4개소(문화관광해설사 배치)

❍ 타시군 관광홍보책자 및 홍보물 벤치마킹 실시

❍ 관광산업 종사자 친절교육 : 문화관광해설사 및 음식점․숙박업소 등

□ 기대효과

❍ 함양의 관광자원을 널리 알려 함양의 브랜드 가치 향상

1

5

관광시설물 유지관리

관광콘텐츠담당 ☏ 5163

일반계속사업

주요 관광시설물의 신속한 보수를 통해 쾌적하고 안전한 환경

조성으로 관광 만족도 향상 및 관광객 유치

□ 추진계획

❍ 관광시설물 개 ․ 보수

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 량	소요예산
계		470
지리산제일문 정비사업	단청 보수 1식	150
연암물레방아 보수 사업	보수공사 설계 1식	20
선비문화탐방로 정비 사업	탐방로(6km) 정비 1식	100
관광시설 재난안전대비 시설보수	관광시설 긴급 보수	50
문화예술마을 등 정비사업	내부시설 정비 1식	30
주요 관광지 기간제근로자 사역	주요 관광지 등	120

□ 기대효과

❍ 관광시설물 적기 보수로 함양을 방문하는 관광객에게 만족도 향상

1

6

최치원 역사공원 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

상림을 조성한 최치원 선생의 애민정신을 기리고, 상림숲과 최치원   역사공원을 연계한 관광인프라를 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 1055번지 일원 (문화예술회관 뒤)

❍ 면    적 : 18,521㎡

❍ 사업내용 : 기념관, 고운역사관, 상림관, 고운루, 도로, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 10,998백만원(지특 1,450, 도비 1,435, 군비 8,113)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	10,998	토목,건축	9,098	내부 인테리어 콘텐츠제작 조경공사	1,900
지특	1,450		1,450
도비	1,435		1,435
군비	8,113		6,213		1,900

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년

□ 추진실적

❍ 공사 총괄(토목, 건축 등) 착공 : 2013. 12월

❍ 도로공사 준공 : 2015. 12월

❍ 전시관, 사료관 등 추가공사 착공 : 2016. 6월

❍ 기념관 준공 : 2016. 12월

❍ 내부시설 실시설계 용역 시행 : 2017. 3월

❍ 전시관, 사료관 준공 : 2017. 7월

□ 추진계획

❍ 내부 인테리어·콘텐츠 제작 및 조경공사 착공 : 2018. 1월

❍ 공사(토목, 건축 등) 준공 : 2018. 3월

❍ 내부 인테리어·콘텐츠 제작 및 조경공사 준공 : 2018. 4월

1

7

지리산 생태체험단지 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

지리산권 동·식물 생태체험 및 학습공간 조성으로 관광객의 휴식과    체험공간으로 활용 및 지역경제 활성화 및 관광시너지 효과 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 강청리 797번지 일원

❍ 면    적 : 66,818㎡

❍ 사업내용 : 생태전시체험관 1동, 황토 및 방갈로 체험관 12동,

오토캠핑장 12면, 경사체험장, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 18,723백만원(지특 7,024, 도비 2,108, 군비 9,591)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	18,723	토목,건축	16,423	체험, 전시 영상시설 설치	2,300
지특	7,024		5,874		1,150
도비	2,108		1,763		345
군비	9,591		8,786		805

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2018년

□ 추진실적

❍ 공사(토목, 건축 등) 착공 : 2013. 12월

❍ 부지조성, 진입도로, 오토캠핑센터, 생태수로 완료 : 2015. 2월

❍ 생태체험전시관, 내부도로, 황토체험관, 방갈로 등 완료 : 2016. 12월

❍ 전시 및 내부시설 실시설계 용역 시행 : 2017. 5월

❍ 토목, 조경, 진입도로 등 준공 : 2017. 12월

□ 추진계획

❍ 체험·전시·영상시설 착공 : 2018. 1월

❍ 전체공사 준공 : 2018. 6월

1

8

선비문화공원 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

상림 숲 및 최치원선생 역사공원과 연계하여 필봉산을 활용한

자연역사문화 공간 창출

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 937-3번지 일원 (필봉산)

❍ 면    적 : 91,887㎡

❍ 사업내용 : 연못 및 물레방아, 정자, 전망대, 최치원사색길(L=0.9km), 역사문화체험거리 조성 등

❍ 사 업 비 : 3,609백만원(군비)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3,609	실시설계 및 군관리계획 결정(변경)	100	사색길조성 연못,정자 조망루 등	3,509
지특
도비
군비	3,600		100		3,509

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

□ 추진실적

❍ 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2016. 1월

❍ 지방재정 투자심사(자체) : 2017. 10월

❍ 실시설계 용역 시행 : 2017. 12월

□ 추진계획

❍ 조성계획 결정(변경)용역 시행 및 편입부지 보상협의 : 2018. 1월

❍ 실시계획 인가 : 2018. 6월

❍ 사업 착공 : 2018. 7월

❍ 사업 준공 : 2019. 12월

1

9

농월정 관광지 정비

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

국민들의 여가활동 증가와 자동차를 이용한 레저활동 증가 등

다양한 형태로 변화하는 관광 추세에 대응하는 관광지로 정비

□ 사업개요

❍ 위    치 : 안의면 월림리 724번지 일원

❍ 면    적 : 138,110㎡

❍ 사업내용 : 주차장, 휴게공원 등

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(지특 4,000, 도비 1,200, 군비 2,800)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		2019년 이후		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	8,000	캠핑센터 주차장 휴게공원	5,300	화장실 리모델링	300	산책로 녹지조성	2,400
지특	4,000		2,650		150		1,200
도비	1,200		795		45		360
군비	2,800		1,855		105		840

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년

□ 추진실적

❍ 캠핑센터, 캐빈하우스 공사 착공 : 2013. 12월

❍ 주차장, 도로 등 공사 착공 : 2016. 2월

❍ 캠핑센터, 캐빈하우스 공사 준공 : 2016. 5월

❍ 휴게공원 등 공사 착공 : 2017. 8월

❍ 주차장, 도로 등 공사 준공 : 2017. 9월

□ 추진계획

❍ 화장실(2개소) 리모델링 공사 착공 : 2018. 4월

❍ 휴게공원 등 공사 준공 : 2018. 8월

1

10

백연유원지 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

❍ 상림공원 일대의 주차장, 숙박시설 등 부족한 관광인프라 시설을 확보하고, 체류형 관광사업 육성을 통한 사계절 관광자원 확보로 관광객을 유치

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 죽곡리 29번지 일원

❍ 면    적 : 196,450㎡ (신규 130,153㎡, 기조성 66,297㎡)

❍ 사업내용 : 주차장 39,706㎡(1,261대), 숙박시설 100실, 푸드존,

오토캠핑장 11,457㎡, 편익시설(특산물판매소 등)

❍ 사 업 비 : 24,650백만원(지 6,700, 도 2,010, 군 15,940)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		2019년 이후		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	24,650	기본계획 용역	49	토지보상 실시설계	1,900	토목,건축 주차장 등	22,701
지특	6,700						6,700
도비	2,010						2,010
군비	15,940		49		1,900		13,991

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년

□ 추진실적

❍ 군관리계획 결정(변경) 및 조성계획 변경 용역 완료 : 2015. 2월

❍ 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2016. 7월

❍ 지방재정 투자심사(중앙) 의뢰 : 2017. 8월 (※결과 : 재검토)

□ 추진계획

❍ 지방재정 투자심사(중앙) 재의뢰 : 2018. 1월

❍ 실시설계 용역 시행 및 편입부지 보상 협의 : 2018. 3월

❍ 실시계획 인가 : 2018. 12월

❍ 국비(지특) 예산 신청 : 2019. 4월

❍ 사업 착공 : 2020. 1월

1

11

용추계곡 물따라 걷는길 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

용추계곡을 테마로 자연친화적 시설과 탐방로를 개설·재정비하여

지역주민 및 외부 관광객에게 휴양 및 힐링 공간 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 안의면 상원리 ~ 하원리 (심원정 주차장 ~ 용추사일주문)

❍ 사 업 량 : L=3.0km(컨틸레버식데크 0.6km, 목교 2개소 등)

❍ 사 업 비 : 3,020백만원(지특 1,350, 도비 405, 군비 1,265)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		2019년 이후		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3,020	기본계획 실시설계 용역	120	토지보상		테크 등 설치	2,900
지특	1,350						1,350
도비	405						405
군비	1,265		120				1,145

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2021년

□ 추진실적

❍ 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2015. 12월

❍ 지방재정 투자심사 승인 : 2016. 6월

❍ 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2017. 4월

□ 추진계획

❍ 실시설계 용역 완료 : 2018. 3월

❍ 산지전용 등 인허가 협의 : 2018. 3월

❍ 편입부지 보상 협의(18년 추경예산 확보) : 2018. 3월

❍ 국비(지특) 예산 신청 : 2018. 4월

❍ 사업 착공 : 2019. 1월

❍ 사업 준공 : 2021. 12월

1

12

창암산~백무동 자락길 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

마천면 소재지와 지리산생태체험단지 및 지리산 백무동 계곡을

연계하여 마천면 전체를 아우르는 종합적인 관광루트 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 ~ 강청리 (마천면소재지 ~ 백무동)

❍ 사 업 량 : L=5.3km(데크 L=0.5km, 흙길정비 L=0.9km 등)

❍ 사 업 비 : 3,190백만원(지특 1,320, 도비 396, 군비 1,474)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		2019년 이후		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3,190	기본계획 실시설계 용역	120	토지보상		테크 등 설치	3,070
지특	1,320						1,320
도비	396						396
군비	1,474		120				1,354

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2021년

□ 추진실적

❍ 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2016. 1월

❍ 지방재정 투자심사 승인 : 2016. 6월

❍ 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2017. 4월

❍ 국립공원 구역(L=1,335m) 환경부 협의 : 2017. 11월

□ 추진계획

❍ 실시설계 용역 완료 : 2018. 3월

❍ 산지전용 등 인허가 협의 : 2018. 3월

❍ 편입부지 보상 협의(18년 추경예산 확보) : 2018. 3월

❍ 국비(지특) 예산 신청 : 2018. 4월

❍ 사업 착공 : 2019. 1월

❍ 사업 준공 : 2021. 12월

1

13

지리산 당흥마을 생태탐방로 조성

관광시설담당 ☏ 5165

일반계속사업

마천면 당흥마을 앞 임천을 따라 걷는 생태탐방로를 조성하여

지리산 둘레길 및 자락길을 연계한 지리산 생태관광루트 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 산94-1번지 일원

❍ 사 업 량 : 탐방로 L=0.4km

❍ 사 업 비 : 400백만원(도비 200, 군비 200)

(단위:백만원)

구분	합계	2017년 이전 (기투자)		2018년		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	400	실시설계	19	탐방로 조성	381
국비
도비	200				200
군비	200		19		181

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

□ 추진실적

❍ 2017년 재정지원건의사업(도비보조) 교부신청 : 2017. 8월

❍ 실시설계 용역 시행 : 2017. 11월

□ 추진계획

❍ 관련 인허가 및 편입부지 보상 협의 : 2018. 3월

❍ 사업 착공 : 2018. 4월

❍ 사업 준공 : 2018. 12월

1

14

체육진흥을 통한 건강한 함양 조성

❍ 체육 종목별 저변확대로 전국대회 유치 등 대외홍보 활성화

❍ 삶의 질 향상에 따른 체육인구 증대로 스포츠 마케팅 제고

개    요

❍ 기    간 : 2016. 1월 ~ 12월

❍ 장    소 : 종합운동

장

, 고운체육관, 체육공원 등

❍ 대    상 : 구 등 18개목

❍ 사 업 비 : 1,107백만원

□ 추진계획

❍ 전국 체육경회 유치 : 연 8회

월별	행 사 명	사 업 비(백만원)			주관단체
		계	지원	자담
계	회	45	340	115
1월	2016년 국 초․중학교 여자축구대회	20	15	5	축구협회
5월	제7회 전국 테니스대회	35	20	15	테니스협회
7월	2016년 함양군수배 전국 실업검도대회	35	25	10	검도협회
7월	2016년 경상남도지사기 국제태권도 대회	80	70	10	태권도협회
7월	제4회 도지사배 전국 산악자전거대회	140	100(도비40)	40	한국산악자전거협회
8월	제9회 노사초배 전국 아마바둑대회	70	65	5	바둑협회
마ㅊ8월	제7회 군수배 전국 마라톤대회	55	30	25	마라톤연합회
9월	제8회 군수배 전국 탁구대회	20	15	5	탁구협회

❍ 도민체육대회 참가 및 군민체육대회 개최 : 4월, 9월

❍ 종목별 협회 및 연합회 체육경기대회 개최 : 연 30회

❍ 전국 및 도 단위 대회 참가 : 연 23회

□ 건    의

❍ 체육진흥을 위한 체육행사 소요예산 1,107백만원 2016년 예산 반영소통과 공유의 가치 창출

체육담당 ☏ 5164

일반계속사업

❍ 체육 종목별 전국 대회 유치를 통한 경기력 향상 도모와 홍보 활성화

❍ 군민들의 체력향상과 군내 지역간의 유대감 활성화를 위한 체육시설 확충

□ 각종 체육대회 추진

❍ 전국대회 유치 : 7개 종목

- 여자축구, 테니스, 태권도, 산악자전거, 바둑, 마라톤, 탁구

❍ 경남도민체전, 경남생활대축전, 군민체육대회 : 봄, 가을

❍ 종목별 협회 체육경기대회 개최 : 30회

❍ 전국 및 도단위 각종 대회 참가 : 25회

❍ 동․하계 전지훈련팀 유치 : 5종목(육상, 축구, 태권도, 테니스, 검도)

※ 총 소요예산 : 1,095백만원

□ 체육시설 확충

❍ 체육시설 유지보수 및 소규모수선

- 유지보수(50백만원) : 연중 실시

- 고운체육관 정비사업 외 3건(170백만원) : 2018년 상반기

❍ 체육시설 정비

- 연암체육관 정비사업 외 2건(200백만원) : 2018년 상반기

❍ 체육시설 확충

- 안의스포츠파크 조성사업 외 1건(470백만원) : 2018년 상반기

❍ 소규모 운동시설 설치

- 3개 마을 운동기구 설치(60백만원) : 2018년 상반기

□ 추진계획

❍ 사업착공 : 2018. 2월

❍ 사업준공 : 2018. 12월

1

15

함양 스포츠파크 조성

❍ 체육 종목별 저변확대로 전국대회 유치 등 대외홍보 활성화

❍ 삶의 질 향상에 따른 체육인구 증대로 스포츠 마케팅 제고

개    요

❍ 기    간 : 2016. 1월 ~ 12월

❍ 장    소 : 종합운동

장

, 고운체육관, 체육공원 등

❍ 대    상 : 구 등 18개 종목

❍ 사 업 비 : 1,107백만원

□ 추진계획

❍ 전국 체육경회 유치 : 연 8회

월별	행 사 명	사 업 비(백만원)			주관단체
		계	지 원	자담
계	8회	455	34 0	115
1월	2016년 전국 초․중학교 여자축구대회	20	15	5	축구협회
5월	제7회 전국 테니스대회	35	2 0	15	테니스협회
7월	2016년 함양군수배 전국 실업검도대회	35		10	검도협회
7월	2016년 경상남도지사기 국제태권도 대회	80	70	10	회
7월	제4회 도지사배 전국 산악자전거대회	140	100 (도비0	40	한국산악자전거협회
8월	제9회 노사초배 전국 아마바둑대회	70	65	5	바둑협회
마ㅊ8월	제7회 군수배 전국 마라톤대회	55	30	25	마라톤연합회
9월	제8회 군수배 전국 탁구대회	20	15	5	탁구협회

❍ 도민체육대회 참가 및 군민체육대회 개최 : 4월, 9월

❍ 종목별 협회 및 연합회 체육경기대회 개최 : 연 30회

❍ 전국 및 도 단위 대회 참가 : 연 23회

□ 건    의

❍ 체육진흥을 위한 체육행사 소요예산 1,107백만원 2016년 예산 반영소통과 공유의 가치 창출

체육담당 ☏ 5164

일반계속사업

❍ 건강한 여가활동 및 삶에 대한 욕구증대로 인한 생활체육 인프라 구축

❍ 전지훈련 유치와 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 백연리 610번지 일원

❍ 면    적 : 210,516㎡(1단계 146,260㎡)

❍ 사업내용 : 다목적구장, 축구장, 족구장, 화장실, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 14,500백만원(부지매입비 7,600백만원 별도)

(단위:백만원)

구 분	계	2017년까지	2018년	2019년이후
계	14,500	7,000	2,500	5,000
국 비	5,800	2,780	1,000	2,020
도 비	150	150	-	-
군 비	8,550	4,070	1,500	2,980

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(1단계)

□ 추진실적

❍ 군계획시설(체육시설) 결정 : 2010. 12월

❍ 토지매입 개시 : 2012. 6월

❍ 각종 용역사업 착수 및 완료 : 2014. 4월 ~ 2015. 11월

❍ 경남도 건설기술 심의 및 계약심사 요구 : 2015. 2월

❍ 실시계획인가(관련 인허가 신청) 및 사업총괄 발주 : 2016. 9월

□ 추진계획

❍ 2017년(2차분) 발주분 사업 준공 : 2017. 12월

❍ 2018년(3차분) 사업 착공 : 2018. 1월

1

16

상림공원 유지관리

상림관리T/F담당 ☏ 5166

일반계속사업

상림공원 및 주변시설을 전국적인 명소로 유지관리 하여 관광객 유치

및 군민 여가 공간 조성

□ 사업개요

❍ 대 상 지 : 상림공원, 고운광장, 어린이공원, 최치원역사공원(341,208㎡)

❍ 기    간 : 2018년 1월 ~ 12월

❍ 소요예산 : 616백만원

□ 추진계획

(단위:백만원)

구 분		내 용	소요예산
계			616
시설물 유지관리 사업비	상림공원	물레방아 정비, 음악분수 유지보수, 벤치 등 보수 및 도색, 발맛사지장 보수 등	225
	고운광장	경관조명, 수목정비	22
	어린이공원	경관조명, 오수펌프, 운동기구, 수목정비, 데크 등 보수 및 도색	57
인건비	상림공원	시설물관리 4, 풀베기 2	98
	고운광장	풀베기 2	37
	어린이공원	시설물관리 1	17
	최치원역사공원	시설물관리 2	29
물품구입		화장지, 청소용품, 피복비, 유지보수 자재, 잔디광장 농지임차료, 복사기 임차료	38
공공요금		전기, 수도, 통신요금	72
재료구입		잔디, 퇴비, 묘종 등	21

□ 애로사항

❍ 성수기 상림 풀베기 인력 부족으로 환경정비 애로

1

17

천년의 숲 상림 생육환경개선사업

상림관리T/F담당 ☏ 5166

일반계속사업

천년의 숲 상림의 생육환경 개선과 상림 수목의 활력을 되찾아

또 다른 천년을 이어갈 건강한 숲으로 만들어 나가기 위함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 운림리 349-1 일원

❍ 면    적 : 182,665㎡

❍ 사업내용 : 수목 지지대 설치, 숲 모니터링

❍ 사 업 비 : 35백만원(국비24, 도비4, 군비7)

(단위:백만원)

구 분	계	2017년까지	2018년
계	444	409	35
국 비	310	286	24
도 비	47	43	4
군 비	87	80	7

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

□ 추진실적

❍ 생육환경 실태조사 용역(1년차) 완료 : 2016. 12월

❍ 낙엽 및 고사목제거 등 생육환경개선사업 시행 : 2017. 3월

❍ 생육환경 실태조사 용역(2년차) 완료 : 2017. 12월

□ 추진계획

❍ 숲 모니터링 시행 : 2018. 2월

❍ 수목 지지대 설치 시행 : 2018. 3월