안 전 건 설 과

Ⅰ. 2018 업무추진 방향	193

Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 국도24호선 교산지구 병목지점 개선사업	197

□ 중기~지지(지방도 742호) 도로 확포장공사	198

□ 지리산 자락 덕전천 정비사업	199

□ 기초생활 인프라 구축사업	200

2. 역점(특수)시책

□ 이은~난평간도로 확․포장공사	201

□ 국도24호선 이은농공단지 단구간 확장사업	202

□ 소하천 정비사업	203

3. 일반계속사업

□ 선제적 재난예방 대책	204

□ 주민숙원사업 시행	205

□ 군도 확․포장사업	207

□ 농어촌도로 확․포장사업	208

□ 상림산책로(운죽선) 조성사업	209

□ 대방~중기간 도로 확․포장공사	210

□ 가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	211

□ 자연친화적 하천관리 사업	212

□ 일반농산어촌 개발사업	213

□ 재해위험저수지 정비사업	215

Ⅰ		2018 업무추진 방향

재난대응체계 확립 및 건실한 건설사업시행

	전략목표
□ 재난·안전관리 역량 강화 □ 예방중심의 안전관리 체계 구축 □ 군민과 함께하는 안전문화 정착 □ 주민숙원사업 시행으로 지역주민 편익증대 □ 도로망 확충으로 지역 균형개발 □ 재해복구 및 재해예방사업 투자 확대 □ 자연친화적 하천관리 □ 지역농촌의 특색을 살린 지역개발과 농업기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상
	단위사업
① 군민 참여형 안전점검 실시 ② 선제적 재난예방 대책 ③ 주민숙원사업 시행 ④ 군도 확․포장사업 ⑤ 농어촌도로 확․포장사업 ⑥ 자연재해 위험지구 정비사업 ⑦ 자연친화적 하천관리사업 ⑧ 소하천 정비사업 ⑨ 일반농산어촌 개발사업 ⑩ 재해위험 저수지 정비사업

	Ⅱ. 2018 주요업무 계획

1

1

국도24호선 교산지구 병목지점 개선사업

도로담당 ☏ 5205

신규사업

관광명소가 많은 우리군의 관광객 증가에 따른 교통량 증가로 주변

도로와의 병목구간으로 인한 교통불편 발생

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리(시외버스터미널~교산삼거리)

❍ 사 업 량 : 도로 확ㆍ포장 L=1.2km, B=35m

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 사 업 비 : 20,000백만원(국비 100%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=1.2km	24,800	설계	300	보상	500	보상 1식 도로확포장 L=1.2km	24,000

❍ 추진실적 및 향후 계획

- 국도 병목지점 개선 6단계 사업 용역 시행(국토부) : 2016. 10월

- 우선순위 선정(국토부) : 2017. 11월

- 실시설계용역 시행 : 2018. 1월

□ 기대효과

❍ 2020 함양산삼항노화엑스포 개최 시 관광객 증가에 따른 교통사고      예방 및 통행불편 해소

❍ 대전~통영, 광주~대구, 함양~울산 고속도로의 간선도로 역할 증대로      원활한 물류수송 등 지역경제 활성화에 기여

1

2

중기~지지(지방도 742호) 도로 확포장공사

도로담당 ☏ 5205

신규사업

지방도 742호선 잔여구간 확포장으로 지역주민과 관광객의 접근성을

높임으로써 관광, 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양군 백전면 운산리 ~ 장수군 번암면 지지리

❍ 사 업 량 : 도로 확ㆍ포장 L=1.6km, B=9.5m

❍ 사업기간 : 2018. 6월 ~ 2023. 6월

❍ 사 업 비 : 6,300백만원(도비 100%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=1.6km	6,300	-	-	설계	300	도로확포장 L=1.6km	6,000

❍ 추진실적 및 향후 계획

- 대방~중기 도로확포장공사 시행중(L=1.9km) : 2014. 11월 ~ 2018. 11월

- 장수군과 공동추진을 위한 노선협의 : 2018. 2월

- 경남도청, 전북도청에 사업설명 및 예산반영 건의 : 2018. 3월

□ 기대효과

❍ 백두대간 도로망 확충으로 지리·덕유권 문화, 관광산업 활성화

❍ 해발 500m 이상 토지에 산양삼, 과수, 특용작물 재배로 지역경제

활성화 및 농가소득 증대

1

3

지리산 자락 덕전천 정비사업

하천담당 ☏ 5203

신규사업

❍ 하천 미개수로 인한 홍수 피해가 빈번하고, 난개발로 인한

종합적 하천 정비 사업 필요

❍ 지리산의 고유한 역사, 문화공간과 연계한 친수공간 조성으로

과거, 현재, 미래가 공존하며 정감어린 아름다운 하천 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마천면 덕전리 일원

❍ 사 업 량 : 지방하천정비 L=6.0km

- 제방 및 호안 L=2.08km, 교량 재가설 3개소, 다목적저류지 1개소

❍ 사 업 비 : 38,500백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월(5년간)

❍ 사업비 투자계획

(단위:백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비				2018년	2019년 이 후
			계	국비	도비	군비
지리산자락 덕전천정비사업	마천면 덕전리	하천정비 L=6.0km	38,500	19,250	5,775	13,475	3,000 (실시설계 및 보상)	35,500

□ 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 : 2017. 10월

❍ 토지보상 : 2018. 7월

❍ 사업착공 : 2019. 1월

□ 기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하여 사유재산 보호

❍ 다양한 친수공간 조성으로 지리산과 연계한 관광자원 확보

1

4

기초생활인프라 구축사업

농업기반담당 ☏ 5206

신규사업

❍ 기계화 경작로 확장을 통해 농기계 이동 등에 불편 해소

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 사업개요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 안의면 이전리 일원, 수동면 상백리 일원

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=6.5km, 용수로개보수 L=5km

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2017년까지	2018년	2019년이후
합 계	3,000		3,000
기계화경작로 확포장(이전)	1,000		1,000
소규모용수개발 (상백)	2,000		2,000

□ 추진계획

❍ 기계화경작로 확포장 및 소규모용수개발사업 실시설계 : 2018. 1.

❍ 사업 착공 : 2018. 3월

❍ 사업 준공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 농기계의 농경지 진입이 원활하여 노동시간 절감 및 소득 창출

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충

1

1

이은~난평간도로 확․포장공사

도로담당 ☏ 5205

역점 및 특수시책

❍ 지방도 연장으로 도로를 이용하는 군민의 교통편익 제공 및

지역 접근성 제고

❍ 지방도 확·포장으로 원활한 통행성 확보로 편익 증진 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 이은~난평간도로 확포장공사

❍ 위    치 : 함양읍 이은리 남산 ~ 난평리 신기

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.1km, B=9.5m, 교량 L=46m

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(도비 85%, 군비 15%)

- 도비 : 15,300백만원, 군비 2,700백만원

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장L=2.1km 교량 1개소 L=46m	18,000	설계용역 보상 1식	1,200	도로확포장L=0.1km 보상 1식	3,000	도로확포장L=2.0km 교량 1개소 L=46m	13,800

❍ 추진실적 및 향후계획

- 실시설계 : 2015. 6월 ~ 12월

- 행정절차 이행 : 2015. 10월 ~ 2017. 10월

- 지방도 노선변경 고시 : 2017. 5월

- 보상협의 : 2017. 8월

- 공사착공 : 2018. 5월

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

2

국도24호선 이은농공단지 단구간 확장사업

도로담당 ☏ 5205

역점 및 특수시책

우리군의 관광객 증가에 따른 교통량 증가로 주변 도로와의

병목현상이 발생되어 도로확장으로 교통불편 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 이은리(인당교~이은농공단지 진입로)

❍ 사 업 량 : 도로 확포장 L=438m, B=35m(4차로)

❍ 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2019. 6월

❍ 사 업 비 : 6,725백만원(국비 100%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=0.44km	6,725	설계용역 1식	104	보상 1식	3,000	도로확포장 L=0.44km	3,621

❍ 추진실적 및 향후 계획

- 국도 병목지점 개량 대상지 결정 : 2016. 10월

- 실시설계 : 2016. 12월 ~ 2017. 3월

- 행정절차 이행 : 2017. 3월 ~ 2018. 2월

- 보상협의 : 2018. 2월

- 공사착공 : 2018. 9월

□ 기대효과

❍ 주민과 관광객의 통행편익을 제공하고 원활한 물류수송으로 지역

경제 활성화에 기여

1

3

소하천 정비사업

하천담당 ☏ 5203

역점 및 특수시책

❍ 수해피해 우려 및 발생 지구의 하천정비로 피해예방과 하천환경 개선

❍ 친환경적 하천 조성으로 생태계 보전과 지역주민 생활편의 제공

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2018년	2019이후
보각소하천정비사업	지곡면 보산리	L=2.44km	3,764	0	320	3,444	지특50% 군 50%

□ 추진계획

❍ 실시설계 : 2018. 1월

❍ 설계심사 : 2018. 6월

❍ 보상협의 : 2018. 7월

□ 기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하고 친수공간 조성으로 주거 환경

개선에 기여

1

1

선제적 재난예방 대책

안전관리담당 ☏ 5201

일반계속사업

❍ 재난예방활동 강화로 위험요인 사전 해소

❍ 재난 초기대응 역량강화로 군민의 생명과 재산보호

□ 추진방향

❍ 실효성 있는 안전관리계획 수립

❍ 취약시설 안전점검 강화

❍ 군민과 함께하는 안전문화운동 전개로 안전의식 고취

□ 추진계획

❍ 재난예방 및 초기 대응역량 강화

- 함양군 안전관리계획 수립 : 2018. 5월

- 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2018. 5월

- 재난취약시설 안전점검 : 125개소(특정105, 시특20 / 연2회)

- 안전신문고 등 재난신고제도 적극 홍보 : 캠페인 연 4회 이상

❍ 안전문화운동 추진

- 어린이 안전체험학습장 운영

·춘기(4월~6월), 추기(9월~10월) 2회 운영

·교육목표 : 연간 500여명/유치원, 초등학생

- 매월 4일 안전점검의 날 운영 : 캠페인 및 취약지역 안전점검 실시

❍ 여름철 물놀이 안전관리 추진 : 2018. 6월 ~ 8월

- 인명구조시설·장비 점검 : 177개소

- 안전관리요원 배치 : 39명 (유급요원 15, 119시민수상구조대 24)

❍ 자연재난 사전대비

- 여름철대비 : 2018. 5월 ~ 10월

·재해취약지역 전수점검, 방재물자 사전확보, 상황관리 철저 등

- 겨울철대비 : 2018. 11월 ~ 2019. 3월

·대설ㆍ한파 피해예방조치, 상습결빙구간 집중관리 등

□ 기대효과

❍ 선제적 재난대응 체계 구축을 통한 군민의 재산·인명피해 최소화

1

2

주민숙원사업 시행

건설담당 ☏ 5204

일반계속사업

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 시행으로 편익제공

❍ 생활주변 불량 시설물 정비로 안전사고 사전 예방

❍ 새마을 농로 편입부지에 대한 민원예방과 행정력 손실 방지

□ 사업개요

❍ 주민숙원 및 소규모 주민숙원사업

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사 업 량 : 248개소

․ 주민숙원사업 : 200개소(4,800백만원)

․ 소규모주민숙원사업 : 48개소(924백만원)

- 사 업 비 : 5,724백만원

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 위    치 : 전 읍ㆍ면

- 사업대상 : 새마을사업 농로 편입부지 이전등기

- 사 업 비 : 60백만원

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 추진계획

❍ 주민숙원사업

- 편입토지 희사승락서 사전 징구 : 2017. 10. ~ 2018. 2월

- 기본조사 및 실시설계 : 2018. 1. ~ 2.

- 사업시행 : 2018. 3. ~ 11.

❍ 새마을사업 편입부지 이전등기

- 분할 및 등기대상 필지 조사 : 2018. 2.

- 협의 취득 및 이전등기 : 2018. 2. ~ 12.

□ 문제점 및 대책

❍ 주민숙원사업의 요구는 많으나 예산부족으로 적절한 지원이 이루어지지 않아 애로 발생, 충분한 예산 확보 필요

□ 기대효과

❍ 생활기반시설 확충으로 주민 편익제공을 통한 삶의 질 향상 기여

❍ 생활주변 안전시설 정비로 농촌지역 노령화 인구의 안전성확보

❍ 차량 및 보행자의 안전을 위협하고 있는 불량 시설정비로 각종

민원해소와 안전사고 사전예방

❍ 민원발생으로 인한 행정력 손실 방지 및 군민의 재산권 보호

1

3

군도 확․포장사업

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 군도의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 사업개요

❍ 노선수 및 사업량 : 24개 노선, L=203.5km

❍ 사업비 : 224,293백만원

□ 그간 추진 실적

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
24	203.5	224,293	113.9	84,571	1.9	1,000	87.7	138,722

□ 추진계획

❍ 사업내용

(단위:km/백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2018년	장래
계	2개소	1.9	3,500	590	1,000	1,910
송계~노상(군도21호)	서하 송계	0.9	1,600	540	500	560	계속 (착공)
안평~호성(군도 7호)	지곡 창평	1.0	1,900	50	500	1,350	계속 (보상)

❍ 추진일정

- 군도 21호(송계~노상)

·사업착공 : 2018. 1.

·사업준공 : 2019. 6.

- 군도 7호(안평~호성)

·측량 및 감정 : 2018. 1.

·보상, 행정절차 : 2018. 3. ~ 12.

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

4

농어촌도로 확․포장사업

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 농어촌도로의 중장기 계획에 의한 연차별 사업 시행

❍ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익 증대

□ 사업개요

❍ 노선수 및 사업량 : 284개 노선, L=667.5km

❍ 사업비 : 680,631백만원

□ 그간 추진 실적

(단위:km/백만원)

노선수	전체		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
284	667.5	680,631	353.57	244,339	9.8	4,370	304.13	431,922

□ 추진계획

❍ 사업내용                                        (단위:km/백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				비고 (진도)
			계	기시행	2018년	장래
계	11개소	9.8	14,023	3,678	4,370	5,975
실도선 (도마진입로)	마천 군자	1.6	800	350	450	0	계속(50%)
촉동선 (등구사진입로)	마천 구양	0.5	1,523	400	600	523	계속(30%)
미금선 (미천진입로)	휴천 대천	0.5	560	30	530	0	계속(보상,공사)
유회선	유림 서주	0.6	900	360	540	0	계속(40%)
옥동선	유림 옥매	1.4	1,540	88	300	1,152	계속(보상)
이장선	안의 이전	1.0	2,000	550	600	850	계속(40%)
동상선	안의 하원	0.6	1,000	70	200	730	계속(보상,공사)
옥해선 (운곡진입로)	서하 운곡	0.5	700	500	200	0	계속(80%)
신촌선	백전 백운	0.8	1,550	230	150	1,170	계속(보상)
운평선	백전 평정	1.2	1,400	300	200	900	계속(보상,공사)
도마선	병곡 도천	1.1	2,050	800	600	650	계속(30%)

❍ 추진일정

- 보상협의 : 2018. 1 ~  5.

- 사업시행 및 추진 : 2018. 1 ~ 11.

- 사업완료 : 2018. 12.

□ 문제점 및 대책

❍ 예산부족으로 공사기간 장기간 소요, 부족사업비 조기 확보

□ 기대효과

❍ 도로 기반시설 확충으로 지역균형개발 및 군민 생활편익 증진

1

5

상림산책로(운죽선) 조성사업

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 상림공원 조성계획과 더불어 공원내 산책로 정비로 관광객 및

주민들이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 함양읍 교산리 상림안내소 ~ 대덕리 죽장마을

❍ 사 업 량 : 산책로 L=0.9km, B=12.5m, 전력선 지중화 1식

❍ 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 6.

❍ 사 업 비 : 4,560백만원(군비 100%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	산책로 L=0.9km	4,560	설계용역 보상 1식	910	산책로 L=0.6km 전선지중화 1식	2,816	산책로 L=0.3km	924

❍ 추진실적 및 향후 계획

- 실시설계 : 2015. 1. ~ 12.

- 행정절차 이행 : 2016. 1. ~ 12.

- 보상협의 : 2017. 5.

- 공사착공 : 2017. 6.

- 공사준공 : 2019. 6.

□ 기대효과

❍ 상림공원 조성계획에 의한 산책로 조성으로 상림공원 환경 개선       및 생활편익 증진

1

6

대방~중기간(지방도 742호) 도로 확․포장공사

도로담당 ☏ 5205

일반계속사업

❍ 임실~백전 간 도로 확․포장사업이 일부 구간만 2004년 확장 후,

장기간 중단된 상태로 동절기 폭설 및 결빙 시 교통불편 초래

❍ 지역주민으로부터 민원이 끊이지 않고 있는 실정에 있음

□ 사업개요

❍ 위    치 : 백전면 운산,백운리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.9km, B=9.5m

❍ 사업기간 : 2014. 11 ~ 2018. 12

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(특교세 7%, 도비 78%, 군비 15%)

□ 추진계획

❍ 투자계획

(단위:km/백만원)

구 분	합 계		기시행		2018년		장래
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	도로확포장 L=1.9km	7,000	도로확포장 L=1.3km	5,950	도로확포장 L=0.6㎞	1,050		0
특교세		500		500		0		0
도 비		5,500		4,450		200		0
군 비		1,000		1,000		850		0

❍ 추진실적 및 향후계획

- 경상남도 투․융자 승인 : 2013. 10.

- 실시설계 완료 : 2014. 2.

- 행정절차 이행 및 보상협의 : 2014. 6. ~ 12.

- 공사착공 : 2014. 10.

- 공사준공 : 2018. 12.

□ 기대효과

❍ 동절기 폭설 및 결빙시 교통불편해소 및 주민편익증대

❍ 영호남을 연결하는 도로망 구축 기반 마련

1

7

가흥3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

복구지원담당 ☏ 5202

일반계속사업

❍ 도로개설 사업 추진에 따른 급경사지 낙석위험 지역 해소

❍ 재해위험지구를 정비하여 주민의 통행 안전 도모

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2018년	2019이후
ㆍ급경사지 붕괴위험지역정비사업 (가흥3지구)	마천면 가흥리	o 사면정비 A=1,702㎡ (국지도60호선)	1,200	400	800	-

□ 추진계획

❍ 실시설계 : 2016. 5월 ~ 2017. 4월

❍ 착    공 : 2017. 5월

❍ 준    공 : 2018. 6월

□ 기대효과

❍ 사면붕괴위험을 해소하여 주민과 차량의 안전한 통행 및 교통편익

증진에 기여

1

8

자연친화적 하천관리 사업

하천담당 ☏ 5203

일반계속사업

❍ 아름다운 자연형 생태하천 복원과 재해로부터 군민의 재산 보호

❍ 치수, 친수, 생태복원 및 역사와 문화가 흐르는 고향의 강으로 하천조성

□ 사업개요

사업명	위 치	사업량	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2018년	2019이후
계	3개소	하천정비 L=9.13km 교량 3개소	62,319	35,956	10,523	10,092
함양위천 생태하천 조성사업	함양읍 죽곡리 (솔숲) ~ 이은리 (인당교)	o 하천정비 L=3.4km o 교량 1개소	30,944	26,091	4,853	-
구룡천 고향의강 조성사업	함양읍 난평리 (신기교) ~ 이은리 (이은교)	o 하천정비 L=2.3km o 교량 2개소	17,687	15,189	2,498	-
소하천 정비사업	관동 소하천외 4개소	o 하천정비 L=5.63km	20,914	7,650	3,172	10,092	관동 미동 오현 남산 학골

□ 추진계획

❍ 착    공 : 2018. 1월

❍ 준    공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 재해로부터 사전 피해를 예방하고 친수공간 조성으로 주거 환경

개선에 기여

1

9

일반농산어촌 개발사업

농업기반담당 ☏ 5206

일반계속사업

❍ 농촌마을의 생활환경정비 및 소득기반 확충

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 권역단위 종합정비사업

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2017년 까지	2018년	2019년 이후
합 계	2권역		7,571	4,257	1,526	1,788
덕암권역	지곡면 덕암리	2015 ~ 2018년	3,856	3,357	499
남덕유산	서상면 상남리	2016 ~ 2019년	3,715	900	1,027	1,788

(단위 : 백만원)

❍ 창조적마을만들기사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2017년 까지	2018년	2019년 이후
합 계	10권역		5,000	550	2,500	1,950
남효마을	지곡면남효리	2017~ 2018년	500	110	390
월평마을	휴천면월평리	2017~ 2018년	500	110	390
거기마을	서하면 송계리	2017~ 2018년	500	110	390
도북마을	수동면 도북리	2017~ 2018년	500	110	390
연서마을	병곡면연덕리	2017~ 2018년	500	110	390
한남마을	휴천면 남호리	2018~ 2019	500		110	390
지곡마을	유림면 손곡리	2018~ 2019	500		110	390
거평마을	지곡면 창평리	2018~ 2019	500		110	390
대로마을	서상면 대남리	2018~ 2019	500		110	390
내동마을	안의면 하원리	2018~ 2019	500		110	390

❍ 농촌중심지활성화사업(일반지구)

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2017년 까지	2018년	2019년 이후
합 계	3건		15,992	1,605	5,691	8,696
병곡면	병곡면 송평리	2018년~ 2021년	6,000		1,000	5,000
백전면	백전면 평정리	2015년~ 2018년	5,486	1,109	2,280	2,097
서하면	서하면 송계리	2016년~ 2019년	4,506	496	2,411	1,599

❍ 취약지역 생활여건 개조사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업 기간	사 업 비				비고
			합 계	2017년 까지	2018년	2019년 이후
합 계	1건
월평	휴천면 월평리	2017년~ 2019년	1,613	243	685	685

□ 추진계획

❍ 창조적마을만들기사업 시행계획 수립 및 착공 : 2018. 1월

❍ 병곡면소재지종합정비사업 기본 및 시행계획 수립 : 2018. 1월

❍ 취약지역생활여건개조사업(월평)하드웨어사업 착공 : 2018. 1월

❍ 서하면소재지․남덕유산․덕암권역 사업 착공 : 2018. 1월

❍ 창조적마을만들기사업(남효,월평,거기,도북,연서) 준공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 농촌마을의 생활환경정비와 주민 소득기반 확충 및 면소재지

거점기능 강화

❍ 농촌지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전 기여

1

10

재해위험 저수지 정비사업

농업기반담당 ☏ 5206

일반계속사업

❍ 저수지 붕괴 등으로 인한 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안정적 농업용수 공급으로 영농환경 개선

□ 사업개요

❍ 사업구분 : 국비보조사업(계속)

❍ 위    치 : 유림면 유평리 유평저수지, 휴천면 호산리 도장골저수지

안의면 대대리 대대웃못저수지

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년(5년간)

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 6,918백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	연도별 사업비				비 고
	계	2017년까지	2018년	2019년이후
합 계	8,418	2,430	1,760	4,228
유평	1,794	1,100	500	194
도장골	2,172	700	540	932
대대웃못	2,952	630	660	1,662
원골	1,500		60	1,440

□ 추진계획

❍ 원골저수지 실시설계 시행 : 2018. 2월

❍ 도장골 ․ 대대웃못저수지 착공 : 2018. 2월

❍ 원골저수지 착공 : 2018. 11월

❍ 유평저수지사업 준공 : 2018. 12월

□ 기대효과

❍ 재해위험을 사전에 정비 및 보강하여 국민의 생명과 재산 보호

❍ 안전적 용수공급으로 영농환경개선 및 주민 소득기반 확충

2020 함양 산삼 항노화 엑스포

2018년 군정 주요업무계획

군민소득 3만불 달성

항노화 플랫폼 함양