휴 양 밸 리 산 업 과

Ⅰ. 2019 업무추진 방향	339

Ⅱ. 2019 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 산삼휴양밸리 온라인 바이럴 마케팅	343

2. 역점(특수)시책

□ 함양산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축	344

3. 일반계속사업

□ 산삼 휴양밸리 조성사업	345

□ 산삼휴양밸리 점진적․전략적 홍보마케팅 추진	346

□ 산림생태문화체험단지 조성사업	347

□ 거․함․산 항노화 휴양체험지구 조성사업	348

□ 산림레포츠단지 조성사업	349

□ 함양 대봉산 산림욕장 조성사업	350

□ 산삼 휴양밸리 에너지 자립화 사업	351

□ 서함양 하이패스IC 접속도로 개설사업	352

□ 환경성질환 예방관리 센터 운영	353

Ⅰ		2019 업무추진 방향

체류형 휴양관광단지 산삼휴양밸리 운영기반 조성

	전략목표
불로장생 2020 산삼항노화엑스포 성공을 위한 관광인프라 구축 산삼휴양밸리 조성사업 단계적･전략적 홍보 마케팅 수립 함양 산삼휴양밸리 조성으로 군 대외이미지 제고 체계적 운영관리로 함양군의 지속적인 성장동력 제공
	단위사업
산삼 휴양밸리 조성사업 산삼휴양밸리 점진적･전략적 홍보마케팅 추진 산림생태문화체험단지 조성사업 거･함･산 항노화 휴양체험지구 조성사업 산림레포츠단지 조성사업 함양 대봉산 산림욕장 조성사업 산삼 휴양밸리 에너지 자립화 사업 ⑧ 서함양 하이패스IC 접속도로 개설사업 ⑨ 환경성질환 예방관리 센터 운영

	Ⅱ. 2019 주요업무 계획

❍ 산삼휴양밸리 BI를 활용한 입소문 마케팅으로 홍보효과 극대화

❍ 일방적 홍보가 아닌 쌍방향적․수평적 홍보

1

1

산삼휴양밸리 온라인 바이럴 마케팅

서비스개발 ☏ 5222

신규사업

개    요

❍ 운영매체: 네이버 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램

사진, 동영상 기반의 모바일 SNS로, 인스턴트(instant, 사진을 볼 수 있는)와 텔레그램(telegram, 전보를 보낸다) 합쳐 만든 이름으로 사진을 손쉽게 다른 사람들에게 전송한다는 뜻을 가지고 있다.

❍ 사 업 비: 20백만원

❍ 사업기간: 2019. 6월 ~ 12월(6개월간)

❍ 시행방법: 온라인 광고 전문업체 대행

바이럴 마케팅?(입소문 인터넷 마케팅)

바이럴(Viral)은 바이러스(Virus)의 형용사로, 바이러스처럼 ‘감염,전염시키다’뜻   으로 소셜 네트워크(SNS) 상에서 입소문처럼 전염성으로 정보가 퍼져나가도록   홍보효과를 극대화하는 마케팅 기법

주요내용

❍ (네이버 블로그 상위노출) 팸투어, 파워블로그 등 다양한 방식을
통하여 산삼휴양밸리 홍보글이 화제가 되는 컨텐츠로 노출 유도

❍ (카페 포스팅) 여행, 육아 카페, 인근 지역 대표 카페 등을 통해
컨텐츠를 등록함으로 대중의 관심 유도

❍ (페이스북, 인스타그램) 유명 채널을 통한 친밀감 유지 및 긍정적
이미지 전달

추진계획

❍ SNS 채널 구축(블로그, 페이스북, 인스타그램 등) : 2019. 1월 ~ 2월

❍ 온라인 광고 전문업체 계약 : 2019. 5월

❍ 마케팅 추진 : 2019. 6월 ~ 12월(개장 6개월 전)

기대효과

❍ 산삼휴양밸리 검색 유입 증가 및 확산 효과 기대

❍ 네티즌들의 자발적인 홍보 유도로 이용객 증가

1

1

산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축

서비스개발 ☏ 5222

역점 및 특수시책

❍ 산삼휴양밸리는 사업장의 범위가 넓을 뿐 아니라 산림레포츠 등

위험시설이 산재하여 이용객의 안전사고가 우려

❍ 이에, 사업장의 효율적이고 체계적인 운영과 관람객의 안전사고

예방 및 이용편익을 제공하기 위해 종합관제시스템을 구축

※ 2018년 道 종합감사 권고사항임

사업개요

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 광평리 산22 일원

❍ 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 1,935백만원 (국비400백만원)

❍ 주요내용 : 방송 및 영상감시 등 시스템 구축 외

① 방송 및 영상감시 시스템 인터페이스 ③ 주차관리시스템 ⑤ 기상관측정보시스템 ⑦ 출입통제시스템	② 산삼콤플렉스센터 방송, CCTV 설비 구축 ④ 종합안내용 전광판시스템 ⑥ 위치정보 및 무전설비 시스템

추진상황 및 실적

❍ 2018.  4월 : 道 종합감사 권고

❍ 2018.  4월 : 방침결재

❍ 2018.  9월 : 제1차 추경 확정(특교세 4억)

❍ 2018.  11월 ~ 2019.  3월 : 기본 및 실시설계용역

추진계획

❍ 2019. 상반기 : 계약 및 착공

❍ 2019. 12월 : 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 원산지구는 현재 진행중인 사업이 많고 관제센터와의 거리상 문제점 등이 있어

⇒ 광평지구 사업완료 후 문제점 등을 보완하여 추가 구축 계획임

❍ 산양삼을 산악관광과 접목한 휴양치유 복합관광 단지를 조성

❍ 산촌지역의 새로운 경영수익사업 모델 창출

1

1

산삼휴양밸리 조성사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2019년(8년간)

❍ 사 업 량

- 모노레일 설치 L=3.95㎞(모노레일카 8인승 10대)

- 상․하부 승강장 1,263㎡(3층, 건축면적 939㎡)

- 진입도로 정비 L=2.5㎞, 주차장 및 기반정비 A=52,400㎡(507대)

❍ 사 업 비 : 250억원(도비 200, 군비 50)

추진계획

❍ 2019. 상반기 : 모노레일 3.95km 설치 완료

❍ 2019. 하반기 : 상부승강장 준공, 개장준비 및 임시운행

❍ 2020. 상반기 : 전면개장운영

기대효과

❍ 국내 최초 산악 관광 모노레일을 4계절 이용하며 대봉산 천혜 절경 감상

❍ 대봉산 정상에서 하차하여 MTB, 산악마라톤, 짚라인 등 각종 레포츠와 연계

❍ 산삼휴양밸리 개장 전 사업시설과 관광휴양상품으로서의 브랜드      가치를 홍보함으로써 주민 및 이용객들의 관심 유도

1

2

산삼휴양밸리 점진적․전략적 홍보마케팅 추진

서비스개발 ☏ 5222

일반계속사업

추진방향

❍ 노출과 전달의 일방향성 홍보가 아닌 공감과 확산의 소통 홍보 추진

❍ 영상광고 송출로 단시간 내 브랜드 인지도 확대 도모

❍ 마케팅 활동의 기반이 될 홈페이지, 어플리케이션, SNS 마케팅 등
홍보마케팅 인프라 구축

추진계획

❍ (홈페이지 및 SNS 채널 구축) 이용도와 파급력이 높은 페이스북, 카카오톡, 인스타그램, 블로그를 중심으로 디자인을 구축하고, 홈페이지와 통합 운영(SNS 친구맺기, 배너광고로 홈페이지 방문 유도 등)

- 소요예산: 금40,000천원

- 사업기간: 계약일로부터 4개월

❍ (홈페이지 가상체험 동영상) 오픈할 단지의 전체적인 모습, 특징과      강점, 이용정보를 쉽고 재미있게 접할 동영상

- 제작내용: 가상체험을 위한 웹 동영상 제작, 홈페이지 내 운용

❍ (홍보 동영상 광고 송출) TV광고, 네이버 등 주요포털 유료 광고      채널, 한국관광공사 국내여행 홈페이지, 경남관광홈페이지 송출

❍ (홍보물 제작 및 배포) 원하는 대상에게 직접적으로 홍보할 수           있고, 유관기관이나 관내 주요 관광지에 비치 및 발송(팸플릿 등)

기대효과

❍ 불로장생 2020 함양산삼항노화엑스포와 연계한 힐링과 치유의 관광 시설들을 홍보함으로 잠재적 이용객들이 오픈을 고대하도록 유도

❍ 여가생활 변화에 따른 체류형 산림휴양공간 조성

❍ 모험 레포츠 체험시설을 통한 산림자원의 새로운 수익모델 창출

1

3

산림생태문화체험단지 조성사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 원산리 산1번지 일원

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년(8년간)

❍ 사 업 량

- 진입도로 확·포장 L=1.81Km, B=11m

- 단체숙소(1동 160명), 식당(A=400㎡), 숲속의 집(15동 60명), 캠핑장(2개소 27면)

- 산림모험시설(어드벤쳐 3코스 62종, 어드벤처 타워 45게임 L=320m)

❍ 사 업 비 : 270억원(국비 135, 도비 40.5, 군비 94.5)

사 업 명	사업비(백만원)					비 고
	계	기투자	2018년	2019년	잔여
산림 생태문화 체험단지 조성사업	27,000	14,261	5,000	5,269	2,470

추진계획

❍ 2019. 12월 : 각종 시설 준공

❍ 2020.  4월 : 개장준비 및 임시운영

❍ 2020.  6월 : 전면 개장

기대효과

❍ 학생, 기업체, 동호회를 타깃으로 산악마라톤･MTB·산림모험시설 등을 활용하여 수익 창출

❍ 숲속의 집 운영으로 체류형 관광 유도

❍ 백두대간권(지리산, 덕유산) 관광자원을 연계한 테마형 체험관광 거점개발

❍ 지역연계개발로 지역관광 이미지 제고와 농가･관광 소득 증대

1

4

거․함․산 항노화 휴양체험지구 조성사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 원산리, 광평리 일원

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

❍ 사 업 량

- 기반시설(탐방로), 심마니 체험길 L=7.1㎞

- 산삼 콤플렉스센터 2,767㎡(지하1층, 지상3층)

❍ 사 업 비 : 98억원(국비 49, 도비 14.7, 군비 34.3)

사 업 명	사업비(백만원)				비 고
	계	기투자	2018년	2019년
거･함･산 항노화 휴양체험지구 조성사업	9,800	3,660	3,000	3,140

추진계획

❍ 2019.  1월 : 탐방로, 심마니 체험길 조성사업 시행

❍ 2019. 12월 : 준공

❍ 2020.  3월 : 전면 개장

기대효과

❍ 산삼 콤플렉스센터 운영으로 휴양밸리의 체계적인 통합관리 가능

❍ 산림레포츠 종합시설 도입으로 전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성

❍ 산악지형을 활용한 다양한 레포츠 시설로 국민의 여가생활 증대

1

5

산림레포츠단지 조성사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 원산리, 광평리 일원

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

❍ 사 업 량

- MTB지원센터 1동(2층, 연면적 896㎡), 짚라인 L=2.19km

- MTB코스 L=7.54km(상급코스 L=6.13㎞, 초급코스 L=1.41㎞)

- MTB체험장 A=1,150㎡, 산악마라톤코스 L=5.6km, 자가발전자전거모노레일 L=100m

❍ 사 업 비 : 60억원(국비 30, 도비 9, 군비21)

사 업 명	사업비(백만원)					비 고
	계	기투자	2018년	2019년	잔여
산림레포츠시설 조성사업	6,000	738	2,000	1,800	1,462

추진계획

❍ 2019. 상반기 : MTB지원센터(원산지구) 착공

❍ 2019. 하반기 : 짚라인 사업 준공 및 한국교통안전공단 안전검사 시행

❍ 2020. 상반기 : 짚라인 개장준비 및 준공

기대효과

❍ 전국 최초 산림레포츠 시범단지 조성으로 해발 1,000m고지에서 산악지형을 활용한 다양한 레포츠를 즐길 수 있음

❍ 산삼휴양밸리 인근에 자연친화적인 산림욕장을 조성

❍ 산림휴양 수요 충족을 위한 보건휴양 서비스를 제공하여

관광객 유치효과 극대화

1

6

함양 대봉산 산림욕장 조성사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산 17번지 일원

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 5월

❍ 사 업 량 : 산책로 L=1.7km, 등산로 L=0.9km, 야외쉼터 A=100,
풍욕장 A=200㎡, 목교 L=20m 등

❍ 사 업 비 : 4억원(국비 2, 도비 0.6, 군비1.4)

추진계획

❍ 2019. 1월 : 산책로 등 사업 30% 완료

❍ 2019. 하반기 : 사업준공

기대효과

❍ 관광객에게 자연친화적 산림휴양 서비스를 제공하여 삶의 질 향상

❍ 학생들을 대상으로 체험학습장으로 이용

❍ 친환경 에너지타운 조성으로 에너지자립화

❍ 산삼휴양밸리 전력 사용에 대비하여 신재생 에너지사업 유치

1

7

산삼 휴양밸리 에너지 자립화 사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 병곡면 광평리 산22번지 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년간)

❍ 사 업 량 : 재생에너지 설치 748㎾(연간발전량 955㎿h)

- 융복합지원사업 : 태양광 163㎾, 태양열 117㎡(50㎾), 지열 85㎾(풍력사업제외)

- 태양광발전 설치사업 : 태양광 450㎾

❍ 사 업 비 : 24억원(융복합지원사업 : 9억원, 태양광발전설치사업 : 15억원)

세부사업명	사업비(백만원)				비 고
	계	기투자	2018년	2019년
총 계	2,400	0	2,400	0
융복합지원사업	900	0	900	0
태양광발전설치사업	1,500	0	1,500	0

추진계획

❍ 2018.  9월 : 풍력사업을 제외한 기타 융복합지원사업 추진

❍ 2019. 상반기 : 태양광발전설치사업 착공

❍ 2019. 하반기 : 사업 준공

문제점 및 대책

❍ 융복합지원사업 중 풍력사업은 각종 행정절차협의의 어려움과

주변소음 및 경제성 등 주변여건과 부합하여 사업취소

기대효과

❍ 태양광 발전설치사업으로 연간 110백만원 발전 예산절감

❍ 불로장생 2020 함양산삼 항노화엑스포, 산삼휴양밸리 조성에 따른 관광 접근성 향상

❍ 시내교통 혼잡 개선으로 인한 주민 편의 증대

1

8

서함양 하이패스IC 접속도로 개설사업

시설관리담당 ☏ 5223

일반계속사업

개    요

❍ 위    치 : 광주~대구고속도로, 병곡면 월암삼거리 부근(광평교 앞)

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

❍ 사 업 량 : 하이패스 IC 개설 1개소(대구방면 진․출입 램프 설치)

❍ 사 업 비 : 99억원(도로공사 43.5, 군비 55.5)

사 업 명	사업비(백만원)					비 고
	계	기투자	2018년	2019년	잔여
총 계	9,900	750	4,000	2,457	2,693
하이패스IC개설	5,550	750	2,000	1,957	843	군비
	4,350	-	2,000	500	1,850	도로공사

추진계획

❍ 2019. 3월 : 편입토지 보상협의 시행(함양군)

❍ 2019. 상반기 : 행정절차 이행

❍ 2019. 상반기 : 사업착공

❍ 2020. 상반기 : 사업준공

문제점 및 대책

❍ 현재 하이패스IC 연결램프 설치사업은 실시 설계 중에 있어 설계가 마무리되면 우리군 부담액이 증가 변경 될 수 있음

1

9

환경성질환 예방관리 센터 운영

환경성질환예방담당 ☏ 5225

일반계속사업

❍ 환경유해인자로 인한 환경성질환 예방관리 기반 구축

❍ 산삼휴양밸리 시설과 연계한 다양한 힐링프로그램 운영

개    요

❍ 센터명칭 : 함양 대봉숲 힐링센터

❍ 위    치 : 함양군 병곡면 광평리 산22번지

❍ 센터규모 : 연면적 2,503㎡ 지하1층 ~ 지상2층

- 치유/체험시설 : 검사‧상담실, 테라피탕, 건강체험존, 건강식당

- 교육/놀이시설 : 건강배움터, 건강활동실, 대강당

- 지원/숙박시설 : 사무실, 휴게실, 숙박동

❍ 소요예산 : 323백만원(균특 52, 도비 4, 군비 267)

추진계획

❍ 세부프로그램 운영계획 수립 : 2019. 2월

❍ 센터 시범 운영 및 개장 : 2019. 하반기

❍ 사업 성공을 위한 지역사회 협력강화(네트워크 구축)

- 함양군 아토피클러스터 구축(센터-보건소-아토피안심학교)

- 산림, 환경, 보건, 의료관련 단체 협약체결 운영 자문

- 경상남도교육청 및 어린이집연합회 등 관련기관 업무 협약

❍ 치유, 체험 등 특화된 힐링프로그램 운영

- 치유(체험)관리 프로그램(테라피 체험, 숲속 체험 등)

- 함양 산삼휴양밸리 시설 연계 힐링프로그램

(자연 치유교실, 산삼휴양밸리 힐링캠프, 대봉숲 건강이야기 등)

기대효과

❍ 휴양, 치유, 복합 관광단지인 산삼휴양밸리와 연계한 대봉숲 힐링센터 조성 및 생활습관 개선을 통한 주민 삶의 질 향상