문 화 관 광 과

Ⅰ. 기본현황	119

Ⅱ. 2020 업무추진 방향	121

Ⅲ. 2020 주요업무 계획

1. 신규사업

□ 지리산조망공원 정비사업	123

□ 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성사업	124

□ 세계유산 명품둘레길 조성사업	125

2. 일반계속사업

□ 제59회 천령문화제 개최	126

□ 제3회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌 개최	127

□ 문화예술행사 활성화	128

□ 활기찬 문화관광 기반조성	129

□ 깨끗하고 안전한 관광시설물 정비	130

□ 지리산권관광개발조합 공동연계사업	131

□ 선비문화 탐방로 활성화(시·군 창의)	132

□ 천년의 정원 조성사업	133

□ 개평한옥마을 관광시설 정비사업	134

백연유원지 조성사업	135

농월정 관광지 정비사업	136

맑은 물 푸른 농촌 가꾸기사업	137

문화재 및 문화유산의 체계적 관리	138

Ⅰ		기본현황

정․현원

구 분	계	문화관광 과 장	문화예술 담 당	관광기획 담 당	관광개발 담 당	문화재 담 당
정 원	15	1	4	3	4	3
현 원	16	1	4	3	4	4

기   능

구 분	분 장 사 무
문화예술 담 당	❍ 문화예술진흥 및 문화예술단체 육성 지도 ❍ 천령문화제, 연암문화제 등 운영 지원 ❍ 게임, 음악산업, 출판인쇄업 관리
관광기획 담 당	❍ 관광행정의 종합 기획조정 ❍ 관광콘텐츠 개발 육성 및 관광홍보 마케팅 ❍ 관광안내판 정비 및 관광시설물 운영관리
관 광 개 발 담 당	❍ 관광시설 사업의 종합 기획조정 ❍ 관광자원화사업 및 각종 관광개발사업 토지보상 ❍ 관광시설물 정비사업
문 화 재 담 당	❍ 문화유산 및 비지정문화재 관리 ❍ 문화재 보수 및 관리 ❍ 전통사찰 보수 및 관리

Ⅱ		2020년도 업무추진 방향

문화가 풍성한 함양군 조성

	전략목표
문화참여 기회 확대로 문화격차 해소 문화유산 보존 강화 및 활용 증진 연 5백만명 관광객 유치시대 개막 관광 인프라 확충으로 지역경제 활성화
	단위사업
생활문화 여건 조성 ⇨ 천령문화제, 연암문화제, 토요무대 운영 등 문화유산 보전 관리 ⇨ 보물, 사적, 천연기념물 등 역사와 문화가 어우러진 관광명소 조성 ⇨ 개평한옥마을, 남계서원 등 전략적 관광 홍보 ⇨ 관광팸투어, 관광박람회 참가 등 다양한 관광자원 개발 ⇨ 백연유원지 조성, 선비문화탐방로 등

1

1

지리산조망공원 정비사업

관광개발담당 ☏ 5163

신규사업

❍ 함양을 방문하는 관광객들에게 지리산 조망의 편안함을 제공하고
오도재 일대의 부족한 관광인프라 구축을 통해 다양한 관광자원 개발

개    요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 마천면 구양리 산60-1번지 일원

❍ 사업내용 : 휴게소·화장실 신축, 주차장 정비, 공원조성 등

❍ 사 업 비 : 1,820백만원(균특 800, 도비 240, 군비 780)

※ 편입부지 보상비 100백만원 별도(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,820	기본 및 실시설계 화장실 신축	220	휴게소 신축 주변정비 등	400	주차장 정비 공원조성 등	1,200
균특	800		-		200		600
도비	240		-		60		180
군비 (보상비)	780 (100)		220 (100)		140		420

추진상황

❍ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2019. 2월

❍ 편입부지 보상협의 추진	: 2019. 4월

❍ 국도비 확보를 위한 경상남도 방문	: 2019. 7월

❍ 화장실 신축사업 시행	: 2019. 11월

추진계획

❍ 화장실 및 휴게소 신축사업 시행	: 2020. 6월

❍ 주차장 정비 등 시행	: 2021. 1월

❍ 사업준공	: 2021. 12월

1

2

도촌마을 ~ 백무동 계곡탐방로 조성사업

관광개발담당 ☏ 5163

신규사업

❍ 도촌마을부터 백무동까지 아름다운 지리산을 느낄 수 있는 계곡탐방로 설치 등 관광자원개발로 백무동일대 관광 활성화 도모

개    요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 마천면 가흥리 ~ 강청리 일원

❍ 사업내용 : 탐방로 L=700m

❍ 사 업 비 : 1,600백만원(균특 800, 도비 240, 군비 560)

※ 편입부지 보상비 300백만원 별도(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,600	편입부지 매입	-	탐방로 조성 L=350m	300	탐방로 조성 L=350m	1,300
균특	800		-		-		800
도비	240		-		-		240
군비 (보상비)	560 (300)		(300)		300		260

추진상황

❍ 실시설계용역 시행	: 2017. 5월

❍ 주민의견 수렴	: 2018. 6월, 10월

❍ 편입부지 보상협의 추진	: 2019. 4월

❍ 국도비 확보를 위한 경상남도 방문	: 2019. 7월

추진계획

❍ 사업시행	: 2020. 6월

❍ 사업준공	: 2021. 12월

1

3

세계유산 명품둘레길 조성사업

문화재담당 ☏ 5164

신규사업

❍ 한국의 서원 세계유산 등재 시 강조되었던 건물뿐 아니라 주변
경관의 가치를 극대화 할 수 있는 관람동선 개발 및 서원의 관광
자원화

개    요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사업예산 : 257백만원(국 180 도 27 군 50)

❍ 사업내용 : 둘레길 조성 2km 및 시설물 제작, 설치(휴게쉼터 등)

- 둘레길 조성 연구용역(문화재청 세계유산팀)을 통해 설계시안, 주요
시설물 설계안 제공 예정

❍ 사업위치 : 세계유산구역 및 완충구역

추진계획

❍ 문화재청 기본계획수립 연구용역	: 2020. 2월 ~ 6월

❍ 문화재청 실시설계용역	: 2020. 6월 ~ 8월

❍ 공사시행(함양군)	: 2020. 8월

❍ 사업완료 및 정산	: 2020. 12월

기대효과

❍ 서원의 경관을 극대화 할 수 있는 관람동선 개발

❍ 인근 자연탐방과 연계한 서원의 관광자원화

1

1

제59회 천령문화제 개최

문화예술담당 ☏ 5161

일반계속사업

❍ 함양의 역사와 문화를 대내외에 널리 알리고 전통문화를 계승발전

❍ 군민의 적극적인 참여로 지역화합의 축제로 육성

행사개요

❍ 기    간 : 2020. 5. 2. ~ 5. 8.(7일간)

❍ 장    소 : 상림공원 일원

❍ 내    용 : 공연·경연·체험·전시 등

❍ 소요예산 : 500백만원(군비)

❍ 주최/주관 : 함양군 / 천령문화제위원회

추진계획

❍ 천령문화제 임원회의 및 기본계획 수립	: 2020. 2월

❍ 천령문화제 임시총회	: 2020. 3월

❍ 천령문화제 홍보	: 2020. 3월 ~ 5월

❍ 천령문화제 개최	: 2020. 5월

기대효과

❍ 타지역과 차별화된 고유한 문화축제로 육성

❍ 군민에 대한 문화예술 향유기회 확대

1

2

제3회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌 개최

문화예술담당 ☏ 5161

일반계속사업

❍ 내방객 유치로 우리 군을 알릴 수 있는 기회 및 지역경제 활성화 도모 ❍ 청소년 연주단체를 육성하여 함양군의 문화자산으로 적극 활용

행사개요

❍ 기    간 : 2020. 8월 중

❍ 장    소 : 문화예술회관 대공연장

❍ 참가인원 : 15,000명정도

❍ 참가단체 : 100개 단체(초, 중, 고, 일반)

❍ 사 업 비 : 58백만원(도비 8, 군비 40, 자부담 10)

❍ 주최/주관 : 경상남도교육청·함양군 / (사)다볕문화

추진계획

❍ 대회 개최계획 수립	: 2020. 2월

❍ 대회진행 집행본부 구성	: 2020. 3월

❍ 참가신청서 접수	: 2020. 5월

❍ 관람객 유치를 위한 홍보	: 2020. 6월 ~ 8월

❍ 대회 개최	: 2020. 8월

기대효과

❍ 지역 문화예술 발전 및 지역경제 활성화

❍ 군민에 대한 문화예술 향유기회 확대

❍ 다볕 유스윈드오케스트라의 전국적 위상 제고

1

3

문화예술행사 활성화

문화예술담당 ☏ 5161

일반계속사업

❍ 다양한 문화예술 행사의 개최ㆍ지원으로 군민화합 실현

❍ 상생ㆍ소통의 장을 마련하여 지역문화 활성화 기여

개    요

(단위 : 백만원)

구 분	내 용	소요예산
계		1,212
함양문화원 지원	문화학교 운영, 학술회의 등 5개 부문	382
함양예총 등 단체 지원	예총제 개최 및 지부 정기전시(연주)회 등 11개 부문	96
문화예술 단체 지원	문학제, 관현악단 정기연주회 등 16개 부문	253
소외계층 문화복지 지원	통합문화이용권	165
함양연암문화제 개최	연암별빛 콘서트 및 학술대회, 체험프로그램 등	80
추모제향	서원제향, 향교춘추석전제 등 12개 부문	62
전통문화계승	정월대보름 행사, 읍면농악대 지원 2개 부문	58
함양유교대학 운영	사서삼경 등 강좌 운영	30
상림 토요무대 운영	음향장비 임차 및 참가자 보상금	28
노래교실 활성화	경연대회, 노래교실 운영	58

1

4

활기찬 문화관광 기반조성

관광기획담당 ☏ 5162

일반계속사업

❍ 우리군 관광명소 홍보와 축제 및 연계관광상품 개발로 국내·외 관광객 유치

추진계획

❍ 관광홍보 및 마케팅

(단위 : 백만원)

구 분	시 기	수 량	소요예산
계			369
관광기념품·홍보물 제작	연중	각 4종	60
함양관광팸투어 운영	연중	5회	19
관광객유치 인센티브제	연중	수시	30
관광박람회 홍보관 운영	연중	3회	30
관광안내표지판 정비	연중	-	160
지리산권 자치단체 친선 체육대회 개최	11월	1회	70

❍ 관광안내소 연중 운영 : 4개소(문화관광해설사 배치)

❍ 관광박람회 홍보관 운영을 통한 관광명소 및 축제‧행사 홍보

❍ 관광홍보책자 및 홍보물 제작‧배포로 적극적인 관광 홍보

❍ 관광안내판 정비로 정확한 관광 안내정보 제공

❍ 관광산업 종사자 친절교육 : 문화관광해설사 및 음식점ㆍ숙박업소 등

기대효과

❍ 함양의 관광자원을 널리 알려 함양관광의 브랜드 가치 향상

1

5

깨끗하고 안전한 관광시설물 정비

관광기획담당 ☏ 5162

일반계속사업

❍ 밝고 깨끗한 관광지 조성으로 방문객 만족도 향상 및 관광객 유치 증대

추진계획

❍ 관광시설물 유지보수

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	소요예산
계		853
관광시설물 유지보수	재난대비, 시설물 주변정비	70
데크시설물 정비	노후 데크시설물 보수	100
숙박·체험 관광시설물 비품 구입	숙박‧체험시설 내 운영비품	70
지리산생태체험단지 시설물 유지보수	비가림시설, 경계난간, 배수로 설치 등	300
주요관광지 주변 경관조성	상림, 개평, 농월정 등 초화류식재 및 유지관리	50
주요 관광지 기간제근로자 사역	주요 관광지 관리	263

기대효과

❍ 관광시설물 적기 보수로 함양을 방문하는 관광객에게 만족도 향상

❍ 재방문 유도로 지역경제 활성화 기여

1

6

지리산권관광개발조합 공동연계사업

관광기획담당 ☏ 5162

일반계속사업

❍ 지리산권 7개 시·군의 연계사업을 공동으로 추진함으로써 상생 발전에 기여

❍ 산재한 관광자원을 테마별·지역별로 연계한 관광코스 개발

추진계획

❍ 공동연계사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	소요예산
계		982
지리산 둘레길 명품화	둘레길 정비 및 편의시설 설치	744
지리산권 관광아카데미 운영	아카데미 교육 및 운영	42
지리산권 관광정보화	홈페이지 및 모바일웹 유지보수	49
지리산권 관광모니터링 운영	우수사례 발굴 및 지원시스템 구축	5
지리산권 관광상품 홍보	관광상품 광고 및 안내책자 제작	38
지리산권 연계관광 상품개발	관광코스 개발 홍보	9
지리산권 농특산물 공동마케팅 지원	7품7미 홍보 및 육성 지원, 판로개척	23
조합운영	조합운영비	72

기대효과

❍ 지리산권 통합 이미지 구축을 통한 지역경제 활성화 도모

❍ 지리산둘레길의 접근 편의성 향상, 편의시설 확충으로 방문객의 만족도 향상 및 재방문 유도

1

7

선비문화 탐방로 활성화(시‧군 창의)

관광기획담당 ☏ 5162

일반계속사업

❍ 탐방로 시설물 보수를 통해 쾌적하고 안전한 탐방로 조성

❍ 탐방로를 찾는 관광객에게 편의제공 및 만족도 향상

사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 서하면 봉전리, 다곡리, 황산리 일원

❍ 사업내용 : 선비문화교류쉼터 조성, 탐방로 우회로 조성 및 보수, 지역역량강화사업, 선비문화탐방로 축제 등

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 700, 도비 90, 군비 210)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		비고
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,000	기본계획용역 1식	894	탐방로 활성화 1식	106
국비	700		626		74
도비	90		80		10
군비	210		188		22

그간 추진현황

❍ 한국농어촌공사 거창·함양지사 위탁 협약	: 2017. 11월

❍ 추진위원회 구성	: 2018. 4월

❍ 기본계획 및 시행계획 수립고시	: 2019. 7월

❍ 탐방로 우회로 조성 및 지역역량강화사업 추진	: 2019. 10월

향후계획

❍ 기초생활 기반확충 및 역량강화사업 시행	: 2020. 3월 ~ 10월

❍ 사업 준공	: 2020. 12월

1

8

천년의 정원 조성사업

관광개발담당 ☏ 5163

일반계속사업

❍ 함양의 우수 자연경관인 천연기념물 제154호 상림과 연계하여
생태·문화적 가치를 극대화시켜 친환경 녹색 관광 정착

개    요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 함양읍 상림공원주변 일원

❍ 사업내용 : 정원 조성 1식

❍ 사 업 비 : 4,400백만원(균특 2,200, 도비 660, 군비1,540)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	4,400	기본 및 실시설계	300	토공 및 부지정리 등	1,400	정원 조성 1식	2,700
균특	2,200		150		700		1,350
도비	660		45		210		405
군비	1,540		105		490		945

추진현황 및 계획

❍ 지방재정 투자심사(자체) 완료	: 2018. 3월

❍ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2019. 2월

❍ 문화체육관광부 등 협의 완료	: 2019. 7월

❍ 용역보고회 및 주민설명회 개최	: 2019. 9월

❍ 기본계획안 확정 및 행정절차 추진	: 2019. 9월

❍ 사업시행	: 2020. 3월

❍ 사업준공	: 2022. 12월

1

9

개평한옥마을 관광시설 정비사업

관광개발담당 ☏ 5163

일반계속사업

❍ 국가지정 중요민속문화재인 일두고택, 오담고택 등 전통한옥을
찾는 관광객 증가에 따른 관광인프라 구축을 위한 부대시설 정비

개    요

□ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

□ 위    치 : 함양군 지곡면 개평리 개평마을 일원

□ 사 업 량 : 기존 주차장 보수 및 화장실 신축, 가로환경 정비, 산책로 정비 등

□ 사 업 비 : 1,220백만원(국비 600, 도비 180, 군비 440)

※ 편입부지 보상비 1,000백만원 별도(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,220	기본계획 실시설계 기존 주차장 보수 및 화장실 신축	620	가로환경정비 산책로 정비 인도교설치 등	600
균특	600		300		300
도비	180		90		90
군비 (보상비)	440 (1,000)		230 (1,000)		210

추진현황 및 계획

❍ 타당성조사 및 기본계획용역 시행	: 2018. 10월

❍ 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최	: 2019. 3월

❍ 실시설계용역 시행	: 2019. 3월

❍ 문화재 현상변경 등 행정절차 추진	: 2019. 7월 ~ 9월

❍ 사업 착공	: 2019. 12월

□ 사업 준공                                   : 2020. 8월

1

10

백연유원지 조성사업

관광개발담당 ☏ 5163

일반계속사업

❍ 상림공원 일대의 주차장, 숙박시설 등 부족한 관광인프라 확보

❍ 체류형 관광사업 육성을 통한 사계절 관광객 유치

개    요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 함양읍 죽곡리 29번지 일원

❍ 면    적 : 97,779㎡

❍ 사업내용 : 주차장, 오토캠핑장, 광장 등 부지 조성

❍ 총사업비 : 17,533백만원(균특 7,419, 군비10,114)

※ 편입부지 보상비 9,800백만원 포함(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	17,533	토지매입 실시설계 용역 등	10,920	주차장 조성 1식	2,838	유원지 조성 1식	3,775
균특	7,419		806		2,838		3,775
도비	-		-		-		-
군비	10,114		10,114		-		-

추진현황 및 계획

❍ 지역개발계획 승인 및 고시[경상남도]	: 2017. 12월

❍ 토지계획 열람공고 및 협의	: 2018. 1월

❍ 실시설계 용역 시행	: 2018. 4월

❍ 사전재해 등 각종 용역 시행	: 2018. 10월

❍ 구역의 지정 및 지형도면 고시[경상남도]	: 2019. 7월

❍ 실시계획 승인·고시[경상남도]	: 2019. 10월

❍ 사업착공	: 2019. 12월

❍ 임시주차장 설치 완료	: 2020. 8월

1

11

농월정 관광지 정비사업

관광개발담당 ☏ 5163

일반계속사업

❍ 국민들의 여가 활동 증가와 자동차를 이용한 레저, 캠핑 활동의
증가로 다양하게 변화하는 관광형태 추세에 대응하는 관광지 개발

개    요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 안의면 월림리 일원

❍ 사업내용 : 주차장, 오토캠핑장, 휴게공원 조성 등

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(균특 4,000, 도비 1,200, 군비 2,800)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	8,000	주차장 오토캠핑장 휴게공원 조성	5,870	종합안내소 등 정비	600	농월정 녹지 조성 등	1,530
균특	4,000		2,935		300		765
도비	1,200		880		90		230
군비	2,800		2,055		210		535

추진상황

❍ 캠핑센터, 캐빈하우스 공사 준공	: 2016. 5월

❍ 주차장, 도로 등 공사 준공	: 2017. 9월

❍ 휴게공원 조성사업 준공	: 2018. 11월

❍ 조경휴게지 공사 시행	: 2019. 7월

❍ 농월정 관리사 및 매표소 리모델링 공사 시행	: 2019. 11월

추진계획

❍ 사업시행	: 2020. 3월

❍ 사업준공	: 2020. 12월

1

12

맑은 물 푸른 농촌 가꾸기사업

관광개발담당 ☏ 5163

일반계속사업

❍ 시설이 노후화된 어린이공원을 상림, 위천 등 우수한 농촌
자연자원과 연계한 관광자원으로 개발

개    요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 함양읍 죽곡리 6번지 일원

❍ 면    적 : 49,350㎡

❍ 사업내용 : 수변경관 보전 및 복원, 기존인프라 시설 정비 및 확충 등

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(균특 2,800, 도비 360, 군비 840)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2019년 이전 (기투자)		2020년		2021년 이후
	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	4,000	기본계획 실시설계용역	1,234	인프라 시설 1식	2,766
균특	2,800		864		1,936
도비	360		111		249
군비	840		259		581

추진현황 및 계획

❍ 한국농어촌공사 거창·함양지사 위탁 협약	: 2018. 3월

❍ 기본계획 용역 시행	: 2018. 4월

❍ 추진위원회 구성	: 2018. 4월

❍ 실시설계용역 시행	: 2019. 5월

❍ 실시설계 승인(경상남도→함양군)	: 2019. 9월

❍ 사업시행	: 2020. 3월

❍ 사업준공	: 2020. 12월

1

13

문화재 및 문화유산의 체계적 관리

문화재담당 ☏ 5164

일반계속사업

❍ 문화재 및 전통사찰 보수를 통해 문화유산의 원형을 보존 관리

❍ 문화유적지 정비로 방문객 유치 및 지역경제 활성화

사업개요

□ 문화재 및 전통사찰 보수

❍ 사업현황

(단위:백만원)

계		세계유산		국가지정		도지정		전통사찰
개소	금액	개소	금액	개소	금액	개소	금액	개소	금액
22	3,190	1	930	10	1,427	10	433	1	400

❍ 사 업 비 : 3,190백만원(국 1,809, 도 545, 군 756, 자부담 80)

□ 문화유적지 정비

❍ 대    상 : 문화유적지 시설유지관리, 의병장 생가 유지관리, 재난대비 긴급 보수

❍ 소요예산 : 919백만원

추진계획

❍ 보수공사 실시설계                           : 2020. 1월 ~ 3월

❍ 문화재청 및 경남도청 설계승인               : 2020. 4월 ~ 5월

❍ 공사시행                                    : 2020. 6월

❍ 사업완료 및 정산                            : 2020. 12월

기대효과

❍ 문화재 및 전통사찰의 보수를 통해 문화유산의 원형 보존 관리ㆍ계승

❍ 문화유산 정비로 방문객 유치 및 지역경제 활성화